제210회 여수시의회 임시회

주종섭 의원 10분 발언 관련 자료

✦ 발언일시 : 2021. 4. 20.(화) / 1차 본회의

- 완료(2건), 추진중(2건), 추진예정(5건)

✦ 주요내용 / 여름철 재해위험지역 안전점검 및 조기복구 촉구(9)

❶ 시전동 오충사 인근 / 붕괴지역 재해 반복(완료)

❷ 웅천지웰2차 망마산책로 / 철계단 파손, 임시복구 중이나 재붕괴 우려(추진예정)

❸ 더 테라스 후면 도로 / 단지 내로 빗물 유입(추진예정)

❹ 웅천부영(애시앙 녹지대) 6·7차 공사장 및 구봉산 자락 임도 / 미복구(추진예정)

❺ 둔덕동 신원아르시스 아파트 절개지 / 산사면 절개지 붕괴 위험(추진예정)

❻ 삼일동 읍동 / 도로에 배수가 잘되지 않아 주택지로 매년 유입(추진중)

❼ 신덕지역 해안도로 / 해안도로 침하 및 유실 진행 중(추진중)

❽ 월내절개지/ 도솔암 입구 토사붕괴, 위험한 임도 방치(추진예정)

❾ 대성베르디힐 / ‘19년 폭우 시 대성베르디힐 공사장 옹벽 붕괴로 차량 매몰(완료)

	여 수 시 (재난안전과)

제210회 임시회 주종섭 의원 10분 발언 관련 자료

- 여름철 재해위험지역 안전점검 및 조기복구 촉구 -

❶ 시전동 오충사 인근 / 붕괴지역 재해 반복 – 공원과

(토사 붕괴가 재발되지 않도록 특별히 관심을 가지고 복구공사 진행)  (완료)

✧ ′21. 3. 23. 웅천보훈회관 녹지대 복구공사 완료

- 사업내용: 개비온 옹벽 설치 완료

- 사 업 비: 37백만 원

✧ ′20. 2. 20. 웅천 저지배수지 태풍피해 복구공사 완료

- 사업내용: 개비온 옹벽 설치 완료

- 사 업 비: 125백만 원

✧ ′20. 11. 24. 웅천 541-1번지 인근 비탈면 피해복구공사 완료

- 사업내용: 개비온 옹벽 설치 완료

- 사 업 비: 28백만 원

❷ 웅천지웰2차 망마산책로 / 철계단 파손, 임시복구 중이나 재붕괴 우려 – 공원과

(붕괴된 토사는 임시방편으로 천막으로 덮혀져 있지만 또다시 산사태 우려)    (추진예정)

✧ ‘20. 8. 파손 철계단 및 붕괴된 녹지대 법면 임시 복구 완료

- ’21. 4. 공법 선정 및 설계완료

- ‘20. 7. ~ 8. 사업비 확보(특별교부세 1억원 신청 중) 사업 추진 예정

❸ 더 테라스 후면 도로 / 단지내로 빗물 유입 - 공원과

(이순신공원 내 도로 굴곡지점에 빗물이 고이고 넘쳐 단지내로 유입, 주민 불안)   (추진예정)

✧ 이순신공원 주차장 배수로 설치는 계획 중에 있으며, 사업추진 시 공원에서 주차장으로 연결되는 도수로 연결을 포함하여 추진

- ‘21. 8. ~ 9. 사업비(1억 원) 확보하여 실시설계 및 사업추진 예정

❹ 웅천부영(애시앙 녹지대) 6·7차 공사장 및 구봉산자락 임도 / 미복구 – 공원과, 건설과

(임도 붕괴위험지역 아직도 완전 복구되지 않음)    (추진예정)

✧ ‘20. 8. 임도는 임시복구 완료하였으나 웅천 애시앙 녹지대 침하로 인한 임도 파손 된 것으로 웅천 녹지대 보수·보강과 연계하여 사업추진 할 사항이나 녹지대 복구 사업비 과다(5억 원, A=3,500㎡)로 녹지대 복구 사업비 확보 후 임도와 연계하여 사업추진 할 계획 임

- ‘21. 8. ~ 9. 사업비(5억 원) 확보하여 실시설계 및 사업추진 예정

❺ 둔덕동 신원아르시스 아파트 절개지 / 산 사면 절개지 붕괴 위험 – 허가민원과

(산사면 절개지 붕괴 위험, 특별한 안전 점검과 재해 발생 않도록 해야함)   (추진예정)

✧ ‘21. 3. 전문가와 해빙기 안전점검 실시 함.(전문가 의견: 절토사면 대부분 암반노출, 보수·보강 시급)

⇒ 둔덕동 신원아르시스 아파트 절개지는 입주민들로 소유권 대지권 이전된 사유시설로 「급경사지 재해예방에 관한 법률」제17조(재해예방을 위한 긴급안전조치 등)에 따라 관계인(해당 토지의 소유자·점유자 또는 관리인)이 보수·보강 등 안전조치를 해야함.

⇒ 신원아르시아파트 측에’22년 공동주택 지원 사업 신청 안내하고자 함.

❻ 삼일동 읍동 / 도로에 배수가 되지 않아 주택지로 매년 유입 – 도로시설관리과

(마을 앞 도로를 넘친 우수가 배수가 제대로 되지 않아 주택지로 매년 유입)   (추진중)

✧ 삼일동 읍동지역 침수해소를 위하여 배수관 정비공사를  ‘21. 4. 시행 중으로사를 ’21. 6. 완료하여 불편을 해소 하겠음

- 공 사 명: 삼일동 읍동마을 앞 도로 배수관 정비공사

- 위    치: 삼암동 1356-3번지 일원

- 공사내용: 배수로 설치 L=70m

- 공 사 비: 40,000천원

- 공사기간:‘21. 4. 28. ~ 6. 26.

❼ 신덕지역 해안도로 / 해안도로 침하 및 유실 – 건설과

(해안도로가 침하하고 있어 차량운행 불안 가중, 파도로 인한 도로 유실 진행)   (추진중)

✧ 신덕마을 해안도로 하부가 파도 등으로 인해 침식된 지역으로 현재 정비공사 추진 중(‘21. 5. 13. 계약체결)으로 7월 중 복구 완료하도록 하겠음[현장점검(’21. 3.), 실시설계 (’21. 4.)]

- 공 사 명: 삼일동 신덕마을 호안도로 정비공사

- 위    치: 신덕동 118-1번지 일원

- 공사내용: 호안도로 정비 L=185m

- 공 사 비: 200,000천원

- 공사기간:‘21. 5. 20. ~ 7. 18.

❽ 월내절개지 /‘도솔암 입구 토사붕괴, 위험한 임도 방치 – 도시계획과

(임도 붕괴 위험에 처해 있음에도 방치)      (추진예정)

✧ 토사붕괴 및 임도 붕괴 위험지는 개발행위(폐기물재활용시설) 허가지로 공사 중단된 상태로 공사이행 추진계획서를(2017. 5. 17.까지) 제출 하도록 하였으며, 공사이행 추진계획에 따라 조속 복구 하도록 하겠음

- 위    치: 월내동 568-8번지 외 2필지

- 허가면적: 9,757㎡

- 피허가자: ㈜상록바이오산업

- 사업기간: 2021. 1. 5. ~ 2022. 12. 31.

❾ 대성베르디힐 /‘19년  폭우 시 대성베르디힐 공사장 옹벽 붕괴로 차량 매몰 – 허가민원과

(‘19년 여름 폭우로 문수동 대성베르디힐 옹벽 붕괴로 차량 매몰되었던 사고가 있었음)  (완료)

✧ ‘19. 6. 29. 문수동 대성베르힐 공사장 옹벽 붕괴되어 ’20. 3. 30. 계단식 옹벽공사 완료함

-‘19. 6. 29. 옹벽붕괴(차량7대 매몰, 인명피해 없음)

-‘19. 9. 30. 옹벽공사 착공

-‘20. 3. 30. 계단식 옹벽공사 완료

-‘20. 6. 12. 행위허가 사용검사 필증 발급