중점관리 대상사업 내역서

① 정책사업명	신월동 봉양마을 도시계획도로개설(완료)
② 추진배경	협소한 도로 확장으로 주민 교통불편 해소 및 주거환경 개선
③ 사업개요	○ 위 치 : 신월6길 1(신월동) 일원 ○ 사 업 량 : L=120m, B=8m ○ 사 업 비 : 1,500백만 원 (공사비 320, 보상비 및 기타 730)
④ 사업부서	여수시 도로과		⑤ 담당자		시설8급 조진우 시설5급 강 균
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‘18. 1. ~‘21. 6.
<그간 주요 추진내용>
○ 공사 집행계획 수립 ※ 도로과-458호		‘18. 1.12.		장세길 도시계획과장(대결) 김기채 과장 장두한 회계과장 장지문 계약1팀장 서범규 팀장 김준현 주무관
○ 공사 실시설계용역 계약 체결 ※ 도로과-506호 ※ 회계과-1121호		‘18. 1.15. (1.29.)		김기채 과장 장두한 회계과장 장지문 계약1팀장 서범규 팀장 오민주 주무관 김준현 주무관
○ 실시설계용역 준공 ※ 도로과-4968호		‘18. 5. 2.		조일수 국장 김기채 과장 서범규 팀장 김준현 주무관
○ 주민설명회 개최 ※ 도로과-8124호		‘18. 8. 9.		김기채 과장 서범규 팀장 김준현 주무관
○ 도시계획시설(도로)사업 실시계획 인가 신청 ※ 도로과-8973호		‘18. 8.22.		문태선 과장 서범규 팀장 김준현 주무관

○ 지적측량 완료 및 지적공부 정리 ※ 한국국토정보공사 여수지사-3846호 ※ 도로과-13622호	`18.10.17. ~ 18. (12.18.)	문태선 과장 서범규 팀장 김준현 주무관
○ 감정평가 의뢰 및 시행 ※ 도로과-2585,3068호	`19. 3. 4. (3. 14.)	서유권 과장 이재종 팀장 문지환 주무관
○ 공사계약의뢰 ※ 도로과-8213호	`19. 7. 2.	서유권 과장 배도선 팀장 김준현 주무관
○ 공사 착공 ※ 도로과-9422호, ㈜우창건설	‘19. 7.31.	서유권 과장 이재태 팀장 김준현 주무관
○ 토지수용재결 신청 ※ 도로과-13478호	‘19.11. 1.	김기채 국장 서유권 과장 이재태 팀장 이덕연 팀장 김준현 주무관 문지환 주무관
○ 석면폐기물 처리용역 계약의뢰 ※ 도로과-14278호	‘19. 11. 20.	서유권 과장 이재태 팀장 김준현 주무관
○ 석면폐기물 처리용역 착수계 ※ 도로과-14930호	‘19. 12. 9.	서유권 과장 이재태 팀장 김준현 주무관
○ 석면폐기물 처리용역 준공계 ※ 도로과-924호	‘20. 1. 22.	서유권 과장 이재태 팀장 박재연 주무관
○ 편입토지 손실보상비 집행 ※ 도로과-976호	‘20. 1. 22.	서유권 과장 박은규 과장 손하진 팀장 이덕연 팀장 문지환 주무관
○ 석면폐기물 철거공사 준공계 ※ 도로과-2438호	‘20. 2. 25.	서유권 과장 이재태 팀장 박재연 주무관
○ 가연성폐기물 처리용역 착수계 ※ 도로과-5303호	‘20. 4. 14.	서유권 과장 이재태 팀장 박재연 주무관
○ 가연성폐기물 처리용역 준공계 ※ 도로과-7840호	‘20. 6. 12.	서유권 과장 이재태 팀장 박재연 주무관
○ 지하시설물 GIS DB 구축 용역 착수계 ※ 도로과-9864호	‘20. 7. 24.	서유권 과장 이재태 팀장 박재연 주무관
○ 편입국유지 손실보상비 집행 ※ 도로과-13400호	‘20. 10. 19.	장세길 국장 조계윤 과장 손하진 팀장 강 균 과장 김희신 팀장 문지환 주무관
○ 변경계약 체결 ※ 도로과-13565호	‘20. 10. 22.	강 균 과장 조계윤 과장 손하진 팀장 이재태 팀장 임선진 주무관
○ 신월동 봉양마을 도시계획도로 개설공사 준공 ※ 도로과-14430호	‘20. 11. 11.	강 균 과장 이재태 팀장 임선진 주무관