정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서(완료)

① 정책사업명	여수시 육아종합지원센터 건립공사
② 추진배경	저출산 문제의 극복을 위하여 가족‧공동체의 육아기능 보완과 창의적인 놀이체험 공간 등을 활용한 육아종합지원센터를 설치함으로써 종합적이고 체계적인 육아서비스를 제공하기 위함
③ 사업개요	○ 사업목적 : 여수시 육아종합지원센터 건립공사 ○ 위 치 : 여수시 웅천동 1820-1번지(노유자 부지) ○ 사 업 비 : 4,030백만 원 ○ 사업내용 : 1,546.1㎡(연면적 1,354.56㎡/ 지상 3층)
④ 사업부서	여수시 여성가족과		⑤ 담당자		여성가족과장 차미정 사회복지7급 이선옥
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‘14. 10. ~ ‘20. 3.
<그간 주요 추진내용>
○ 엄마품 육아종합지원센터 건립 계획 수립 ※ 여성가족과-45116호		‘14.10.14.		주철현 시장 이승옥 부시장 김보희 국장 신지영 과장 장병연 팀장 이영민 주무관
○ 여수시 육아종합지원센터 건립 기본 및 실시설계용역 계획 ※ 여성가족과-40001		‘16. 8.22.		주철현 시장 최종선 부시장 성동범 국장 신영식 과장 장병연 팀장 선인숙 주무관
○ 여수시 육아종합지원센터 건축 설계공모 실시 계획 수립 ※ 여성가족과-6200		‘17. 2. 8.		주철현 시장 최종선 부시장 성동범 국장 조수현 과장 조영화 팀장 박해원 주무관
○ 여수시 육아종합지원센터 건립공사 시행(발주) ※ 여성가족과-54974		‘17.12. 5.		주철현 시장 최종선 부시장 성동범 국장 조수현 과장 조영화 팀장 박해원 주무관

○ 공사 일시 중지 - 건축, 전기, 소방, 통신 ※ 여성가족과-582호	‘18. 1. 4.	조영은 국장 조수현 과장 조영화 팀장 박해원 주무관
○ 공사 감리용역 계약 - 건축, 전기, 소방, 통신 ※ 회계과-23088호	‘18. 5. 9.	송병구 국장 장두한 과장 장지문 팀장 오민주 주무관
○ 공사 재개(건축) ※ 회계과-24089호	‘18. 5.15.	송병구 국장 장두한 과장 장지문 팀장 김성욱 주무관
○ 공사 일시정지 해지 검토보고 (전기, 소방, 통신) 및 해지 ※ 여성가족과-26097, 26110호	‘18. 5.30.	代이정화 과장 조수현 과장 조영화 팀장 박해원 주무관
○ 인테리어공사 설계용역 추진 계획 ※ 여성가족과-14499호	‘19. 3.20.	송선현 국장 노정열 과장 조영화 팀장 이선옥 주무관
○ 인테리어공사 설계용역 계약 의뢰 ※ 여성가족과-14584호	‘19. 3.21.	노정열 과장 조영화 팀장 이선옥 주무관
○ 인테리어공사 설계용역 계약 ※ 회계과-20938호	‘19. 5. 1.	박은규 과장 손하진 팀장 홍예랑 주무관
○ 인테리어공사 설계용역 일시정지 요청 ※ 여성가족과-33276호	‘19. 7. 8.	차미정 과장 조영화 팀장 이선옥 주무관
○ 육아종합지원센터 BF 본인증 용역 완료 ※ 회계과-43478	‘19. 8.29.	박은규 과장 손한진 팀장 정선영 주무관
○ 육아종합지원센터 위·수탁 계약 체결 ※ 여성가족과-45629	‘19. 9.25.	이정화 국장 차미정 과장 조영화 팀장 이선옥 주무관

○ 육아종합지원센터 설계용역 일시 정지 해지 요청 ※ 여성가족과-59362호	‘19.12.16.	차미정 과장 조영화 팀장 이선옥 주무관
○ 공사 설계용역 일시정지 해지 통보 ※ 회계과-23088호	‘19.12.19.	박은규 과장 손하진 팀장 정선영 주무관
○ 인테리어공사 추진 계획 ※ 여성가족과-60235호	‘19.12.19.	권오봉 시장 고재영 부시장 이정화 국장 차미정 과장 조영화 팀장 이선옥 주무관
○ 인테리어공사 계약 의뢰 ※ 여성가족과-60270호	‘19.12.19.	차미정 과장 조영화 팀장 이선옥 주무관
○ 인테리어공사 계약 체결 ※ 회계과-1739호	‘20. 1.10.	양기원 국장 박은규 과장 손하진 팀장 조민아 차장
○ 인테리어공사 설계변경 검토 보고 ※ 여성가족과-7228호	‘20. 2.14.	차미정 과장 김수언 팀장 이선옥 주무관
○ 인테리어공사 변경계약 통보 ※ 회계과-9554	‘20. 2.21.	代김학섭 과장 박은규 과장 손하진 팀장 조민아 차장
○ 육아종합지원센터 개관 ※ 여성가족과-14571	‘20. 3.17.	이정화 국장 차미정 과장 김수언 팀장 이선옥 주무관