[별지 제2호 서식]

정책실명제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2017-24

담당부서

작성자

건설교통국/ 도시계획과

김희찬/ 659-4563

정 책 명

□빛과 색이 어우러진□컬러빌리지 조성사업

사업개요

○ 추진배경

고소천사벽화마을 및 종화동 자산마을 일원에 ‘낮에는 색(지붕 도색 등), 밤에는 빛(경관 조명 등)□컨셉의 컬러빌리지를 조성하여 여수밤바다와 어우러진 24시간 아름다운 브랜드 경관 창출을 통한 도시경쟁력 제고

○ 위    치 : 종포해양공원 일원 수변 원도심(고소동, 종화동)

○ 세부개요

세부사업		사업비(백만원)	주요내용
계		985
1	옹벽∙비탈면 개선 및 도색	404	- 옹벽 도색 : 5개소 - 비탈면 개선 : 1개소 - 조명시설 : 4개소
2	공동∙단독주택 지붕∙벽면도색	581	- 공동주택 벽면도색 : 1개단지 - 단독주택 지붕도색 : 약 200동

○ 사업기간 : ’17. 1. 3.～’18. 9.23.

○ 추진진도 : 100%

추진경과 및 사업 관련자

□ 추진경과

○ '16. 3.15.: 컬러빌리지 조성사업 추진 계획 수립

- 관련자 : 도시재생과 팀장 김태완, 팀장, 과장 김학섭,
국장 전동호, 부시장 이승옥, 시장 주철현

○ '17. 1. 3.: 옹벽도색(5개소)사업 착공

- 관련자 : 도시계획과 주무관 김희찬, 팀장 김태완, 과장 김회근,
국장 전동호

○ '17. 5.10.: 옹벽도색(5개소)사업 준공

- 관련자 : 도시계획과 주무관 김희찬, 팀장 김태완, 과장 김회근,
국장 전동호

추진경과 및 사업 관련자	○ '17. 6.13.: 비탈면 개선(1개소)사업 착공 - 관련자 : 도시계획과 주무관 김희찬, 팀장 배도선, 과장 김회근, 국장 조일수 ○ '17. 6.13.: 종화동 주택도장공사 착공 - 관련자 : 도시계획과 주무관 김희찬, 팀장 배도선, 과장 김회근, 국장 조일수 ○ '17. 6.27. : 고소동 주택도장공사 착공 - 관련자 : 도시계획과 주무관 김희찬, 팀장 배도선, 과장 김회근, 국장 조일수, 부시장 최종선 ○ '17.10.20. : 한신아파트 외벽도장공사 착공 - 관련자 : 도시계획과 주무관 김희찬, 팀장 배도선, 과장 장세길, 국장 조일수, 부시장 최종선 ○ '17.11. 9 .: 비탈면 개선(1개소)사업 준공 - 관련자 : 도시계획과 주무관 김희찬, 팀장 배도선, 과장 장세길, 국장 조일수 ○ '17.11. 9. : 종화동 주택도장공사 준공 - 관련자 : 도시계획과 주무관 김희찬, 팀장 배도선, 과장 장세길, 국장 조일수 ○ '17.12.11. : 고소동 주택도장공사 준공 - 관련자 : 도시계획과 주무관 김희찬, 팀장 배도선, 과장 장세길, 국장 조일수, 부시장 최종선 ○ '18. 4.26. : 한신아파트 외벽도장공사 준공 - 관련자 : 도시계획과 주무관 김희찬, 팀장 배도선, 과장 장세길, 국장 조일수, 부시장 최종선