정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-34	담당부서 작성자	건설교통국/도로시설팀 김준현/659-4078
정 책 명	만흥동 마래터널 앞 도로 확장
사업개요	○ 추진배경 - 마래터널과 군부대 앞까지 도로폭이 4∼5m(1차로)로 차량 교행이 어려워 교통정체 및 안전사고 위험상존 - 도로기반시설 확충 풍광과 멋을 살리는 국제해양관광 중심 도시건설 ○ 추진기간 : 2014.10.∼ 2017.7 ○ 총사업비 : 26억원(공사비 22.5, 보상비 및 기타 3.5) ○ 주요내용 - 위 치 : 만흥동 162-5번지 - 규 모 : L= 320m, B= 8.5m
추진경과 및 사업 관련자	□ 주요 추진경과 및 사업관련자 현황 ○ 실시설계용역 및 실시계획인가 :14.10. ∼ 16. 3. ○ 계약체결 및 착공 : ‘16. 4.22. ○ 시공방법 개선 방침 및 변경 결정 : ‘16. 6.14. ∼ 7. 4. ○ 실시계획(변경) 인가 : ‘16. 10. 5. ○ 무연분묘 개장 공고(1차 45기) : ‘16. 10.10. ∼ ’17. 1. 9. ○ 일시정지 해지 및 사업 추진 : ‘16. 10.25. ○ 재난안전 특별교부세 교부결정(8억원) : ‘16. 10.31. ○ 무연분묘 개장 공고(2차 45기, 추가 10기) : ‘16. 11.23. ∼’17. 1.22. ○ 설계변경 심사 완료 : ‘17. 1. 4. ○ 무연분묘 개장 용역 완료 : ‘17. 2.27. ○ 변경계약[암사면 절취 반영] : ‘17. 3.13. ○ 실정보고 접수 및 승인[지장물 이설] : ‘17. 3.20. ○ 발파암 처리 계획 검토 : ‘17. 4. 5. ○ 암 검측 결과 보고 : ‘17. 5.22. ○ 도로 개통 : ‘17. 7. 7. ○ 준공 : ‘17. 7.14. - 관련자 : 도로과 주무관 김동언, 팀장 서범규, 과장 김기채, 국장 조일수, 부시장 최종선, 시장 주철현