중점관리 대상사업 관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-44	담당부서 작성자	산단환경사업단/공영개발과 박혜지 / 659-4572
정 책 명	여수 경도 해양관광단지 조성사업
사업개요	○ 박람회 개최 도시 관광기반 구축 및 종합 명품 레저·휴양 시설 조성 ○ 남해안 해양관광자원 개발을 통한 단계별 인프라 구축 및 지역경제 활성화 ○ 사업목적 : 세계적 수준의 해양관광 기반시설 확충 ○ 위 치 : 전남 여수시 경호동 대경도 일원 ○ 사 업 비 : 429,200백만 원 ○ 사업기간 : 2009. 1. ~ 2018. 12. ○ 사업내용 : 골프장 27홀, 콘도 100실, 오토캠핑장 100면 등, 도로, 공영주차장, 오수처리장, 상・하수도 시설, 상가, 테마파크, 항만시설 등
추진경과 및 사업 관련자	□ 주요 추진경과 및 사업관련자 현황 ○‘09.12.31. : 박람회지원시설 사업계획 및 관광단지 조성계획 승인고시 - 관련자 : 공영개발과 주무관 한동원, 팀장 이봉안, 과장 김태옥, 부시장 정인화, 시장 김충석 ○‘12. 5.12. : 여수세계박람회 시설지원(콘도미니엄 100실, 골프코스 9홀 등) - 관련자 : 공영개발과 주무관 명미숙, 팀장 윤국한, 과장 민화기, 부시장 정병재, 시장 김충석 ○‘14.12.26. : 박람회지원시설 1단계 사업 준공(골프장, 콘도, 오토캠핑장) - 관련자 : 공영개발과 주무관 김영배, 팀장 고영근, 과장 김기채, 부시장 이승옥, 시장 주철현 ○‘17. 9. 2. : 2017년도 경도해양관광단지 조성사업 보조금 교부결정 및 집행 - 관련자 : 공영개발과 주무관 주영길, 팀장 김기언, 과장 문태선, 단장 최인규, 부시장 최종선, 시장 주철현

추진경과 및 사업 관련자	○‘17.11.22. : 광양만권경제자유지역 개발계획 변경(경도지구 대체지정고시) - 관련자 : 공영개발과 주무관 김경선, 팀장 김기언, 과장 문태선 ○‘18. 1.12. : 여수박람회 지원시설 구역지정 변경 신청 반려(해수부) - 관련자 : 공영개발과 주무관 김남희, 팀장 김재진, 과장 문태선 ○‘18. 5.23. : 문화체육관광부 업무협의(보조금 집행 관련) - 관련자 : 공영개발과 주무관 김남희, 팀장 김재진, 과장 문태선 ○‘18. 6.28. : 보조금 정산계획서 제출(전남개발공사 → 여수시) - 관련자 : 공영개발과 주무관 김남희, 팀장 김재진, 과장 문태선 ○‘18.10. 4. : 보조금 집행잔액 반납계획서 제출(2014~2016년 잔액) - 관련자 : 공영개발과 주무관 김남희, 팀장 김재진, 과장 유경상 ○ ‘18.12. 3. : 보조금 사업비 변경을 위한 기재부 협의 방문 (경도해양관광단지→여자만갯노을길조성사업, 2018년 보조금 13억원) - 관련자 : 공영개발과 주무관 김남희, 팀장 김재진, 과장 유경상 ○‘18.12. 6. : 지역발전특별회계 관광자원개발사업 내역사업 변경 - 관련자 : 공영개발과 주무관 김남희, 팀장 김재진, 과장 유경상