정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	학용정수장 고도정수처리시설사업
② 추진배경	○ 첨단 막여과 고도정수처리시설 도입으로 시민들에게 깨끗한 수돗물 공급 ○ 노후된 기존 정수처리시설 현대화로 미래 안정적인 수도 기반시설 확충
③ 사업개요	○ 위 치 : 여수시 학용정수장일원 ○ 사 업 량 : 막여과시설 42,000㎥/일 ○ 사 업 비 : 18,135백만 원 ○ 사업기간 : 2012. ~ 2023.
④ 사업부서	여수시 상수도과		⑤ 담당자		시설7급 강호권 시설5급 김정남
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 사업		⑦ 사업기간		‘12. 1. ~‘23. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 추진계획 검토 ※ 상수도과-28140		‘17.12.26.		주철현 시장 최종선 부시장 김동균 단장 하헌옥 과장 명주완 팀장 이재태 주무관
○ 계약심의 요청 ※ 상수도과-28403		‘17.12.27.		하헌옥 과장 명주완 팀장 이재태 주무관
○ 막여과 구입 의뢰 ※ 상수도과-2825		‘18. 2. 7.		주철현 시장 최종선 부시장 정종태 단장 하헌옥 과장 명주완 팀장
○ 사업추진 재검토 결과보고 ※ 상수도과-16599		‘18. 9.13.		권오봉 시장 고재영 부시장 하헌옥 과장 김승주 팀장 이재태 팀장
○ 막여과 기자재 구매 계약체결 ※ 수도행정과-8026		‘18.10.26.		하헌옥 과장 김승주 팀장 이재태 팀장
○ 계약심위원회 심의 요청 ※ 수도행정과-8026		‘18.12.18.		하헌옥 과장 김승주 팀장 이재태 팀장

○ 고도정수처리시설 설치사업 시행계획 보고 ※ 상수도과-342	‘19. 1.10.	권오봉 시장 고재영 부시장 정종태 단장 하헌옥 과장 김승주 팀장 이재태 차장
○ 통합건설사업관리용역 일상 감사 요청 ※ 상수도과-541	‘19. 1.10.	강 균 과장 명호남 팀장 이재태 차장
○ 토목․건축․기계 공사(총괄 및 1차분) 계약 의뢰 ※ 상수도과-641	‘19. 1.14.	강 균 과장 명호남 팀장 이재태 차장
○ 통합건설사업관리용역 계약 심사 의뢰 ※ 상수도과-751	‘19. 1.14.	강 균 과장 명호남 팀장 이재태 차장
○ 정수장(둔덕․학용) 통합건설 사업 관리용역 집행계획 ※ 상수도과-3015	‘19. 2.17.	권오봉 시장 고재영 부시장 김정남 단장 강 균 과장 명호남 팀장 이재태 차장
○ 정수장(둔덕․학용) 통합건설 사업 관리용역 PQ 평가 결과 ※ 상수도과-6693	‘19. 4. 9.	김정남 단장 강 균 과장 명호남 팀장 이재태 차장
○ 정수장(둔덕․학용) 통합건설 사업 관리용역 SOQ 평가 결과 ※ 상수도과-8249	‘19. 5. 2.	김정남 단장 강 균 과장 명호남 팀장 이재태 차장
○ 정수장(둔덕․학용) 통합건설 사업 관리용역 계약체결 의뢰 ※ 상수도과-8249	‘19. 5. 7.	강 균 과장 명호남 팀장 이재태 차장
○ 정수장(둔덕․학용) 통합건설 사업 관리용역 계약체결 ※ 수도행정과-4411	‘19. 6. 4.	강 균 과장 명호남 팀장 이재태 차장
○ 시설공사 계약체결 ※ 광주지방조달청 경영관리과-4295	‘19. 6.11.	강 균 과장 명호남 팀장 이재태 차장

○ 시설공사 착공 ※ 상수도과-11375	‘19. 6.21.	강 균 과장 명호남 팀장 이재태 차장
○ 폐기물처리용역 계약체결 ※ 수도행정과-6323	‘19. 8. 9.	강 균 과장 명호남 팀장 황규석 차장
○ 안전관리계획서 검토 ※ 상수도과-17502	‘19. 9.23.	강 균 과장 명호남 팀장 황규석 차장
○ 둔덕, 학용정수장 고도정수처리 시설 설치사업 (2차분) 집행계획 ※ 상수도과-23484	‘19.12.16	권오봉 시장 고재영 부시장 김정남 단장 강 균 과장 명호남 팀장 황규석 차장
○ 학용정수장 고도정수처리시설 설치사업(2차분)계약 체결 의뢰 ※ 상수도과-23544	‘19.12.17.	강 균 과장 명호남 팀장 황규석 차장
○ 학용정수장 고도정수처리시설 설치사업(2차분)공사 착공 ※ 상수도과-10343	‘19.12.24.	강 균 과장 명호남 팀장 황규석 차장
○ 기술지원건설사업기술인 현장점검 결과보고 ※ 상수도과-4238	‘20. 3. 2.	강 균 과장 명호남 팀장 최상록 차장
○ 기술지원건설사업기술인 현장점검 결과보고 ※ 상수도과-4238	‘20. 3. 2.	강 균 과장 명호남 팀장 최상록 차장
○ 기술지원건설사업기술인 현장점검 결과보고 ※ 상수도과-8562	‘20. 5. 1.	강 균 과장 명호남 팀장 최상록 차장
○ 기술지원건설사업기술인 현장점검 결과보고 ※ 상수도과-10751	‘20. 6. 4.	강 균 과장 명호남 팀장 최상록 차장
○ 공사 준공(1차분)	‘20. 7. 20.	오정환 과장 명호남 팀장 정상기 주무관

○ 소방 및 정보통신공사 시행 ※ 상수도과-20394	‘20.10.21.	서은수 부시장 정은수 단장 김동석 과장 김희경 팀장 오정환 과장 명호남 팀장 정상기 주무관
○ 소방 및 정보통신공사 계약의뢰 ※ 상수도과-21347	‘20. 11. 4.	오정환 과장 명호남 팀장 이강선 주무관 정상기 주무관
○ 소방 및 정보통신공사 감리용역 계약의뢰 ※ 상수도과-23189	‘20. 12. 1.	오정환 과장 명호남 팀장 정상기 주무관
○ 학용정수장 고도정수처리시설 설치사업 총괄(2회) 및 2차분(2회) 변경계약 의뢰 ※ 상수도과-24213	‘20.12.14.	오정환 과장 명호남 팀장 정상기 주무관
○ 학용정수장 고도정수처리시설 설치사업(2차분) 준공	‘20.12.17.	오정환 과장 명호남 팀장 정상기 주무관
○ 학용정수장 고도정수처리시설 설치사업(3차분) 계약 체결 의뢰 ※ 상수도과-241	‘21. 1. 5.	오정환 과장 명호남 팀장 정상기 주무관
○ 「학용정수장 고도정수처리시설 설치사업(3차분)」외 1건 계약체결 및 공사관리관 지정통보 ※ 수도행정과-620	‘21. 1. 11.	오정환 과장 정일석 팀장 정상기 주무관
○ - 학용정수장 고도정수처리시설 설치사업(3차분) - 건축자재(일부 문틀규격) 변경 실정보고내용 검토 보고 ※ 상수도과-2112	‘21. 1. 30.	오정환 과장 정일석 팀장 정상기 주무관
○ 「학용정수장 고도정수처리시설 설치사업(3차분) 관급」계약체결 및 공사관리관 지정 통보 ※ 수도행정과-2524	‘21. 2. 4.	오정환 과장 정일석 팀장 정상기 주무관

○ 「학용정수장 고도정수처리시설 설치사업」하도급관리계획서 변경 승인요청에 따른 검토보고 ※ 상수도과-2799	‘21. 2. 8.	오정환 과장 정일석 팀장 정상기 주무관
○ ‘학용정수장 고도정수처리시설 설치사업’ 기계공사(소방) 변경 실정보고 건 승인 통보 ※ 상수도과-4784	‘21. 3. 9.	오정환 과장 정일석 팀장 정상기 주무관
○ ‘학용정수장 고도정수처리시설 설치사업’ 슬러지배출수관 변경 시공 실정보고 건 승인 통보 ※ 상수도과-5874	‘21. 3. 23.	오정환 과장 정일석 팀장 정상기 주무관
○ - 학용정수장 고도정수처리시설 설치사업 - 막여과동 바닥마감재 변경 실정보고내용 검토 보고 ※ 상수도과-7884	‘21. 4. 19.	오정환 과장 정일석 팀장 정상기 주무관
○ - 학용정수장 고도정수처리시설 설치사업 - 체크밸브(기계) 사양변경 실정보고내용 검토 보고 ※ 상수도과-7882	‘21. 4. 19.	오정환 과장 정일석 팀장 정상기 주무관
○ '둔덕 및 학용정수장 고도정수처리시설 설치사업(전기)' 관급자재(배전반) 구매 계획 검토 보고 ※ 상수도과-10290	‘21. 5. 28.	권오봉 시장 서은수 부시장 김지선 단장 이돈주 과장 송향장 팀장 오정환 과장 정일석 팀장 정상기 주무관
○ 「학용정수장 고도정수처리시설 설치사업(3차분)」 기성금 지급 결정 알림 ※ 수도행정과-12367	‘21. 6. 28.	오정환 과장 정일석 팀장 정상기 주무관
○ '학용정수장 고도정수처리시설 설치사업' 막여과 처리수 유출관(D600) 시공결과 실정보고내용 검토 보고 ※ 상수도과-10290	‘21. 7. 8.	오정환 과장 정일석 팀장 정상기 주무관

○ 둔덕 및 학용정수장 고도정수처리시설 주말 및 휴일(8월) 운영계획 승인 통보 ※ 상수도과-14620	‘21. 7. 28.	오정환 과장 정일석 팀장 정상기 주무관
○ - 학용정수장 고도정수처리시설 설치사업 -스틸그레이팅 구조보강 및 흡음시설 실정보고내용 검토 보고 ※ 상수도과-	‘21. 8. 30.	박현식 부시장 김지선 단장 이돈주 과장 송향장 팀장 오정환 과장 정일석 팀장 정상기 주무관
○ ‘둔덕 및 학용정수장 고도정수처리시설’ 막여과 스틸그레이팅 보강 등 실정보고 건 승인 통보 ※ 상수도과-	‘21. 8. 30.	오정환 과장 정일석 팀장 정상기 주무관
○ 둔덕 및 학용정수장 고도정수처리시설 주말 및 휴일(10월) 운영계획 승인 통보 ※ 상수도과-18890	‘21. 9. 30.	오정환 과장 정일석 팀장 정상기 주무관
○ '학용정수장 고도정수처리시설 설치사업(전기) 관급자재(유량계) 제작·설치 사업' 시행 ※ 상수도과-19069	‘21. 9. 30.	김지선 단장 이돈주 과장 송향장 팀장 오정환 과장 정일석 팀장 정상기 주무관
○ 정수장(둔덕·학용) 고도정수처리시설 설치사업 통합건설사업관리용역(4차분) 집행계획 ※ 상수도과-22825	‘21. 11. 23.	권오봉 시장 박현식 부시장 김지선 단장 이돈주 수도행정과장 송향자 수도경리팀장 오정환 과장 정일석 팀장 정상기 주무관
○ 학용정수장 고도정수처리시설 설치사업 총괄(4회) 및 3차분(1회) 변경계약 의뢰 ※ 상수도과-24077	‘21. 12. 14.	오정환 과장 정일석 팀장 정상기 주무관

○ 학용정수장 고도정수처리시설 설치사업(3차분) 준공	‘21. 12. 16.	오정환 과장 정일석 팀장 정상기 주무관
○ 둔덕·학용 고도정수처리시설 설치사업(4차분) 집행계획 ※ 상수도과-691	‘22. 1. 10.	권오봉 시장 박현식 부시장 김지선 단장 이돈주 수도행정과장 송향자 수도경리팀장 오정환 과장 정일석 팀장 정상기 주무관
○ 학용정수장 고도정수처리시설 설치사업(4차분) 착공	‘22. 1. 19.	김 혁 차장
○ 둔덕·학용 고도정수처리시설 설치사업 막여과동 배관연결부 시공 실정보고 건 승인 통보 ※ 상수도과-5275	‘22. 3. 7.	주영근 과장 정일석 팀장 김 혁 차장
○ 둔덕·학용 고도정수처리시설 설치사업 관급자재(자동스트레이너)재구매 요청	‘22. 4. 8.	주영근 과장 정일석 팀장 김 혁 차장
○ 둔덕·학용 고도정수처리시설 설치사업 관급자재(자동스트레이너)재구매 협의 ※ 상수도과-8096	‘22. 4. 14.	김 혁 차장
○ 건설폐기물처리 시스템(올바로)공인인증서 등록 신청(둔덕, 학용정수장 고도정수)	‘22. 4. 19.	주영근 과장 정일석 팀장 김 혁 차장
○『정수장[둔덕·학용]고도정수처리시설 통합건설사업관리용역』 기술인(기계) 변경 투입에 따른 자격검토	‘22. 4. 21.	주영근 과장 정일석 팀장 김 혁 차장
○정수장(둔덕·학용)고도정수처리시설 통합건설사업관리용역 건설사업관리기술인 변경 검토 회신	‘22. 4. 21.	주영근 과장 정일석 팀장 김 혁 차장
○『정수장[둔덕·학용]고도정수처리시설 통합건설사업관리용역』 기술인(기계) 변경 승인 통보 ※ 상수도과-9215	‘22. 4. 25.

○『둔덕·학용정수장 고도정수처리시설 설치사업』 원수유입관로 변경 설계자 의견 제출	‘22. 5. 4.	주영근 과장 정일석 팀장 김 혁 차장
○학용정수장 고도정수처리시설 설치사업 관급자재(자동스트레이너) 재구매 요청	‘22. 5. 4.	주영근 과장 정일석 팀장 김 혁 차장
○「학용정수장 고도정수처리시설 설치사업」 설계변경(총괄분 4회, 4차분 1회) 계약 의뢰	‘22. 6. 10.	주영근 과장 정일석 팀장 김 혁 차장
○「학용정수장 고도정수처리시설 설치사업 폐기물처리 용역」 설계변경 계약 의뢰	‘22. 6. 15.	주영근 과장 정일석 팀장 김 혁 차장
○「학용정수장 고도정수처리시설 설치사업」 설계변경 사항(총괄분 4회, 4차분 1회) 통보 ※ 상수도과-13148	‘22. 6. 15.	주영근 과장 정일석 팀장 김 혁 차장
○「학용정수장 고도정수처리시설 설치사업 폐기물처리 용역」 변경계약 사항 통보 ※ 상수도과-13646	‘22. 6. 23.	주영근 과장 정일석 팀장 김 혁 차장
○「학용정수장 고도정수처리시설 설치사업」품질, 안전, 환경관리계획서 변경 검토보고	‘22. 6. 30.	주영근 과장 정일석 팀장 김 혁 차장
○「학용정수장 고도정수처리시설 설치사업」품질, 안전, 환경관리계획서 변경 승인 통보	‘22. 6. 30.	주영근 과장 정일석 팀장 김 혁 차장
○「둔덕·학용정수장 고도정수처리시설 설치사업 통합건설사업관리용역」기술인(전기) 변경 승인 통보	‘22. 8. 25.	주영근 과장 서범규 팀장 강호권 주무관
○「학용정수장 고도정수처리시설 설치사업」염소투입설비 변경설치 실정보고 변경 승인 통보	‘22. 9. 20	한광민 단장 주영근 과장 서범규 팀장 강호권 주무관
○「학용정수장 고도정수처리시설 설치사업」포장계획 변경설치 실정보고 변경 승인 통보	‘22. 9. 20	주영근 과장 서범규 팀장 강호권 주무관

○「둔덕·학용정수장 고도정수처리시설 설치사업 통합건설사업관리용역」기술인 투입계획 변경 승인 통보(책임 및 분야)	‘22. 9. 26	주영근 과장 서범규 팀장 강호권 주무관
○ 학용정수장 고도정수처리시설 설치사업 막모듈 변경관련 실정보고 승인 통보	‘22. 10.13.	주영근 과장 서범규 팀장 강호권 주무관
○ 학용정수장 고도정수처리시설 설치사업 물가변동에 따른 계약금액 조정(3회) 검토 및 승인	‘22. 11.11.	박현식 부시장 한광민 단장 조계윤 수도행정과장 장내근 수도경리팀장 주영근 과장 서범규 팀장 강호권주무관
○ 학용정수장 고도정수처리시설 설치사업 물가변동에 따른 계약금액 조정(4회) 검토 및 승인	‘22. 11.21.	박현식 부시장 한광민 단장 조계윤 수도행정과장 장내근 수도경리팀장 주영근 과장 서범규 팀장 강호권주무관
○ 학용정수장 고도정수처리시설 설치사업 총괄분 5회 도계약 설계변경 심사완료	‘22. 12.19.	주영근 과장 서범규 팀장 강호권 주무관
○ 학용정수장 고도정수처리시설 설치사업 총괄분 5회, 4차분 2회 도계약 설계변경 시행	‘23. 1. 2	주영근 과장 김낙진 요금팀장 장내근 수도경리팀장 서범규 팀장 강호권 주무관
○ 학용정수장 고도정수처리시설 설치사업 물가변동으로인한 계약금액 조정 검토보고 및 승인(5회)	‘23. 1. 3	김종기 부시장 한광민 단장 김낙진 요금팀장 장내근 수도경리팀장 주영근 과장 서범규 팀장 강호권주무관
○ 학용정수장 고도정수처리시설 설치사업 시운전 용역 일상감사	‘23. 1. 4	주영근 과장 서범규 팀장 강호권 주무관

○「학용정수장 고도정수처리시설 설치사업 5차분」시행 및 계약의뢰	‘23. 1. 12.	정기명 시장 김종기 부시장 김태횡 단장 김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리 팀장 서범규 팀장 강호권 주무관
○「학용정수장 고도정수처리시설 설치사업 종합시운전 용역」시행 및 계약 의뢰	‘23. 1. 25.	김종기 부시장 김태횡 단장 김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리 팀장 서범규 팀장 강호권 주무관
○「학용정수장 고도정수처리시설 설치사업」 유해물질관련 장치 설치 및 식재보완」검토보고 및 승인 통보	‘23. 3. 10.	김태횡 단장 김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리 팀장 서범규 팀장 강호권 주무관
○「학용정수장 고도정수처리시설 설치사업(전기)」실정보고 승인	‘23. 4 12	김종기 부시장 김태횡 단장 김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리 팀장 서일원 팀장 박정호 주무관
○「학용정수장 고도정수처리시설 설치사업」관급자재 유량계 실정보고 승인	‘23. 4 13.	김태횡 단장 김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리 팀장 서일원 팀장 박정호 주무관
○「학용정수장 고도정수처리시설 설치사업」물가변동에 따른 계약금액 조정(6회) 승인	‘23. 4 17.	김태횡 단장 김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리 팀장 이광재 팀장 강호권 주무관

○ 「둔덕·학용정수장 고도정수처리시설 설치사업」구내배관·공사기간 변경 및 종합시운전 등의 실정보고에 따른 검토 보고	‘23. 4. 18.	김태횡 단장 김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리 팀장 이광재 팀장 강호권 주무관
○「둔덕·학용정수장 고도정수처리시설 설치사업(6건)」변경계약(사업기간)연장 승인	‘23. 4. 25.	김태횡 단장 김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리 팀장 이광재 팀장 강호권, 한기원 주무관
○「정수장(둔덕,학용)고도정수처리시설 통합건설사업관리용역(총괄7회), 4차분(2회)」 실정보고 및 변경계약 의뢰	‘23. 4. 28.	김종기 부시장 김태횡 단장 김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리 팀장 이광재 팀장 강호권 주무관
○「학용정수장 고도정수처리시설 설치사업(관급)」프로세스 제어 탁도계 등 실정보고에 따른 검토보고	‘23. 5. 16.	김종기 부시장 김태횡 단장 김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리 팀장 서일원 팀장 박정호 주무관
○「학용정수장 고도정수처리시설 설치사업」종합시운전 용역 책임기술인 변경 승인	‘23. 6. 7.	김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리 팀장 이광재 팀장 강호권, 한기원 주무관
○「학용정수장 고도정수처리시설 설치사업」막여과시설 배관세정을 위한 설치·해체 실정보고에 따른 검토 보고 및 승인	‘23. 6. 13.	김태횡 단장 김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리 팀장 이광재 팀장 강호권 주무관
○「학용정수장 고도정수처리시설 설치사업」약품실 응집제 투입용 정량펌프 교체 및 배관설치 실정보고 및 승인	‘23. 6 13.	김태횡 단장 김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리 팀장 이광재 팀장 강호권 주무관

○「학용정수장 고도정수처리시설 설치사업(전기공사)」실정보고에 따른 설계변경(1회) 검토보고 및 설계 변경 심사 요청	‘23. 6. 13.	김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리 팀장 서일원 팀장 박정호 주무관
○「학용정수장 고도정수처리시설 설치사업(관급)」프로세스제어 실정보고에 따른 설계변경(1회)검토보고 및 계약심사 요청	‘23. 6. 19.	김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리 팀장 서일원 팀장 박정호 주무관
○「학용정수장 고도정수처리시설 설치사업(전기)」실정보고 승인	‘23. 7. 4.	김태횡 단장 김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리 팀장 서일원 팀장 박정호 주무관
○「정수장(둔덕.학용)고도정수처리시설 통합건설사업관리용역 총괄(8회), 5차분(1회)」설계변경 검토보고 및 변경 계약 의뢰	‘23. 7. 21.	정기명 시장 김종기 부시장 오정환 단장 김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리 팀장 이광재 팀장 강호권 주무관
○「학용정수장 고도정수처리시설 설치사업」기존 구내배관 보완 및 시공개선 검토보고 및 승인 통보	‘23. 8. 25.	김종기 부시장 오정환 단장 김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리 팀장 이광재 팀장 강호권 주무관
○「학용정수장 고도정수처리시설 설치사업(통신)」설계변경 계약의뢰	‘23. 9. 12.	김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리 팀장 서일원 팀장 박정호 주무관
○「학용정수장 고도정수처리시설 설치사업 총괄(6회), 5차분(1회), 폐기물(2회) 설계변경 검토보고 및 변경계약 의뢰	‘23. 10. 5.	김종기 부시장 오정환 단장 김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리 팀장 이광재 팀장 강호권 주무관

○「학용정수장 고도정수처리시설 설치사업(전기)」설계변경 검토 보고 및 변경계약 의뢰	‘23. 10. 10.	오정환 단장 김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리 팀장 서일원 팀장 박정호 주무관
○「학용정수장 고도정수처리시설 설치사업(관급)」프로세스제어 실정보고에 따른 설계변경(1회)검토보고 및 계약심사 요청	‘23. 6. 19.	김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리 팀장 서일원 팀장 박정호 주무관
○「학용정수장 고도정수처리시설 설치사업(전기)」실정보고 승인	‘23. 7. 4.	김태횡 단장 김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리 팀장 서일원 팀장 박정호 주무관
○「학용정수장 고도정수처리시설 설치사업(전기, 프로세스)」설계변경 계약 의뢰	‘23. 7. 24.	김정남 과장 서일원 팀장 박정호 주무관
○「학용정수장 고도정수처리시설 설치사업」기존 구내배관 보완 및 시공개선 검토보고 및 승인 통보	‘23. 8. 25.	김종기 부시장 오정환 단장 김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리 팀장 이광재 팀장 강호권 주무관
○「학용정수장 고도정수처리시설 설치사업(통신)」설계변경 계약의뢰	‘23. 9. 12.	김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리 팀장 서일원 팀장 박정호 주무관
○「학용정수장 고도정수처리시설 설치사업 총괄(6회), 5차분(1회), 폐기물(2회) 설계변경 검토보고 및 변경계약 의뢰	‘23. 10. 5.	김종기 부시장 오정환 단장 김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리 팀장 이광재 팀장 강호권 주무관

○「학용정수장 고도정수처리시설 설치사업(전기)」설계변경 검토 보고 및 변경계약 의뢰	‘23. 10. 10.	오정환 단장 김정남 과장 최재영 수도행정과장 명미숙 수도경리 팀장 서일원 팀장 박정호 주무관