특수공시

특수공시 사업 목록

(2019. 12. 31. 기준 / 단위 : 억원)

사 업 명		총사업비	부 서 명	비 고
1.	진남 배드민턴 전용구장 건립	75	체육지원과
2.	여수 청소년해양교육원 건립	180	투자박람회과
3.	조·명 연합수군 테마 관광단지 조성	108.31	관광과
4.	여자만 갯노을길 조성	109	관광과
5.	여수 시립박물관 건립	280	문화예술과
6.	전라좌수영 동헌일원 복원사업	215	문화예술과
7.	여수 선소유적 테마정원 조성사업	293	문화예술과
8.	어르신 문화체육센터 신축	104	노인장애인과
9.	웅천 ~ 소호 도로 개설	678.73	도로과
10.	신기동 공영주차장 신축	78	교통과
11.	서교지구 행복주택 건설	231	허가민원과
12.	소제지구 택지개발	1,834	공영개발과
13.	둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업	423	상수도과
14	돌산읍 우두리 하수도 중점관리지역 정비사업	316	하수도과

1		진남 배드민턴 전용구장 건립

체육지원과 임예은(659-3268)

실태		□ 여수시 배드민턴 동호인(1,400여명)의 배드민턴 전용시설 건립 청원
추진방향		□ 배드민턴 전용구장 건립
기대효과		□ 시민 숙원 해소, 종목 역량 강화 및 생활체육 활성화 도모

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 진남체육관길 74

◦ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.

◦ 사업규모 : 2층/1동, 연면적 3,300㎡, 코트 12면, 부대시설

◦ 사 업 비 : 75억원(균특 22.5, 특교 10, 도비 0.5, 시비 42)

◦ 공 정 률 : 10%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2019년까지	2020년 이후	비 고
계	75		75
국 비	32.5		32.5
도 비	0.5		0.5
시 비	42		42
기 타

사업진행 현황

◦ 지방재정 투자심사	: 2018.  6. 11.

◦ 공유재산관리계획 의결                      : 2019.  2. 22.

◦ 건축설계 공모	: 2019. 10. 28.

◦ 실시설계 착수	: 2020.  3.  3.

◦ 실시설계 완료	: 2020. 11.

◦ 공사 착공	: 2020. 12.

◦ 공사 준공	: 2021. 12.

위 치 도

전경사진 (조감도)

2		여수 청소년해양교육원 건립

투자박람회과 박스민(659-3468)

실태		□ 청소년 해양재난 대처능력 배양을 위한 전문 안전체험 및 교육기관 필요
추진방향		□ 해양 분야 체험‧교육시설 건립
기대효과		□ 안전한 체험학습 공간 조성 및 박람회장 사후활용 활성화

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 수정동 776번지

◦ 사업기간 : 2017년 ~ 2021년

◦ 사업규모 : 대지면적 4710.90㎡, 건축 연면적 6,238㎡/지하1·지상4층(1동)

◦ 사 업 비 : 180억(국비 98억, 도비 21억, 시비 61억)

◦ 공 정 률 : 12%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2019년까지	2020년 이후	비 고
계	180	52	128
국 비	98	20	78
도 비	21	9	12
시 비	61	23	38
기 타

사업진행 현황

◦ 기본 및 실시설계 용역	: 2017.  6. 14.

◦ 경제성 등 검토 용역	: 2017.  7. 17.

◦ 여수박람회법 개정안 공포	: 2018. 12. 11.

◦ 청소년해양교육원 건축공사 착공	: 2019.  3. 4.

◦ 전시시설 제작‧설치 계약 체결	: 2019. 12. 3.

◦ 기초 콘크리트 타설 공사	: 2019. 12. ~

위 치 도

전경사진 (조감도)

3		조ㆍ명 연합수군 테마 관광단지 조성

관광과 박성원(659-3882)

실태		□ 급증하는 관광수요와 다양하게 변화되는 관광산업의 추세에 효율적으로 대처하고 풍부한 생태자원을 활용한 관광인프라 필요
추진방향		□ 명나라 수군 도독 진린장군, 등자룡 장군과 조·명 연합수군의 항일 전쟁 스토리 등을 활용 역사공원 조성
기대효과		□ 조·명연합수군의 항일전쟁 스토리 등 관광상품 개발을 통한 중국 및 국내 관광객 유치 증대와 새로운 관광인프라 구축으로 지역경제 활성화 기여

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 묘도7길 110(이순신대교 홍보관 일원)

◦ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2022. 12.(5년)

◦ 사업규모 : 테마공원 조성(29,661㎡)

◦ 사 업 비 : 108.31억원(국비 30, 시비 78.31)

◦ 공 정 률 : 22%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2019년까지	2020년 이후	비 고
계	108.31	66.35	41.96
국 비	12.70	12.70
도 비	17.30		17.30
시 비	78.31	53.65	24.66
기 타

사업진행 현황

◦ 기본계획 수립용역 준공	: 2016. 10. 20.

◦ 실시설계 용역 착수	: 2018.  5.  3.

◦ 토지보상 협의	: 2018.  6. ~

◦ 도시관리계획(역사공원) 결정 고시	: 2019. 11.  7.

위 치 도

전경사진 (조감도)

1

2

3

4

5

6

7

9

8

이순신대교 홍보관

① 조명기념원

④ 데크전망대

③ 화계가든

② 조명승전길

⑤ 조명체험마당

⑥ 조명화합마당

⑧ 데크산책로

⑦ 휴게쉼터

4		여자만 갯노을길 조성

관광과 박성원(659-3882)

실태		□ 여자만 권역은 해안을 끼고 있는 30개의 전형적인 농어촌마을로 갯벌과 간척지, 섬 등 다양한 자연·생태자원을 보유한 지역으로 풍부한 생태자원을 활용한 관광인프라 필요
추진방향		□ 여자만 권역의 잠재된 생태관광자원 개발로 남해안 관광허브 도시의 토대를 구축
기대효과		□ 천혜의 자연자원을 보유하고 있는 여자만 권역을 광역 순환형 생태 체험 관광루트로 개발하여 관광객 유치 도모

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 율촌면 상봉리 ~ 화양면 장수리 일원

◦ 사업기간 : 2016. 6. ~ 2021. 3.

◦ 사업규모 : 갯노을길 L=38km, B=1.5 ~ 3.0m

◦ 사 업 비 : 112억원(국비 56, 시비 56)

◦ 공 정 률 : 72%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2019년까지	2020년 이후	비 고
계	112	106.6	5.4
국 비	56	53.3	2.7
도 비
시 비	56	53.3	2.7
기 타

사업진행 현황

◦ 총괄 및 1차분 착공	: 2016.  6. 27.

◦ 1~3차분 준공(반월~복촌, 이천지구)	: 2018. 12. 25.

◦ 4차분 착공(이천지구, 상봉~봉전)	: 2019.  3.  6.

◦ 일반해역이용협의	: 2019. 11.  4.

◦ 공사 일시정지(공유수면 점·사용협의)	: 2019. 12. 10.

위 치 도

변경(신설)

이천 해상데크

복촌 해상데크

전경사진

5		여수 시립박물관 건립

문화예술과 소은애(659-4526)

실태		□ 여수지역의 문화유산 보존・연구・전시・교육 가능한 박물관 필요
추진방향		□ 지역의 정체성 확립을 위한 여수시립박물관 건립
기대효과		□ 체계적인 문화유산 보존 및 지역문화 활성화

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 웅천동 1865-1번지

◦ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

◦ 사업규모 : 부지면적 33,000㎡, 건축연면적 6,300㎡, 1동

◦ 사 업 비 : 285억(국비 112억, 시비 173억)

◦ 공 정 률 : 25%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2019년까지	2020년 이후	비 고
계	285	5	280
국 비	112		112
도 비
시 비	173	5	168
기 타

사업진행 현황

◦여수시립박물관 건립 기본계획수립 용역         : 2018. 10.

◦공립박물관 설립타당성 사전평가 통과           : 2019.  5. 1.

◦지방재정 중앙투자심사 조건부 승인             : 2019.  7. 2.

◦공공건축사업계획 사전검토 완료                : 2019. 12. 26.

◦설계공모지침 작성 등 용역                     : 2020.  1. ~ 4.

◦설계공모 및 실시설계용역 추진                 : 2020.  5. ~

◦건축・전시공사	: 2021.  6.

◦여수시립박물관 개관                           : 2022.

위 치 도

전경사진

6		전라좌수영 동헌일원 복원사업

문화예술과 강한빛(659-4757)

실태		□ 도시계획시설결정(공원, 도로), 면적11,263㎡
추진방향		□ 일제강점기 훼철, 소실된 동헌을 복원하여 체계적인 문화재 보존 및 호국충절의 도시 정체성 확립
기대효과		□ 동헌일원 복원하여 도시 정체성 확립 및 관광자원 활용

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 군자동 일원

◦ 사업기간 : 2015년  ~  2022년

◦ 사업규모 : 동헌복원 및 주변정비

◦ 사 업 비 : 215억원(국 3, 도 70, 시 142)

◦ 공 정 률 : 5%(토지매입 및 건물 철거 중)

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2019년까지	2020년 이후	비 고
계	215	55	160
국 비	3		3
도 비	70		70
시 비	142	55	87
기 타

사업진행 현황

◦ 기본계획 수립	: 2015.  8.

◦ 도시관리계획 결정 및 실시계획 인가	: 2017.  1.

◦ 1,2,3단계 구역 토지매입 및 건물 철거	: 2019.  1.

◦ 1,2,3단계 구역 시굴 및 발굴	: 2019.  8.

◦ 외곽 도시계획도로 공사중	: 2020. 현재

위 치 도

전경사진 (조감도)

7		여수 선소유적 테마정원 조성사업

문화예술과 정동섭(659-4751)

실태		□ 조선시대 유적지로 사적 제392호(1995.4.20.) 지정, 면적133,484㎡
추진방향		□ 거북선 제작의 역사적 장소성을 살려 역사ㆍ문화 체험공간으로 정비 하여 문화교육관광 자원으로 활용
기대효과		□ 영상전시관 및 체험마을, 테마정원 조성 등을 통한 지역관광 명소로 개발하여, 쾌적한 휴식공간 제공 및 지역경제 활성화에 기여

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 시전동 선소유적 지내

◦ 사업기간 : 2020. 7. ~ 2024. 1.

◦ 사업규모 : 영상전시관, 메모리얼 가든, 체험마을, 테마길 조성 등

◦ 사 업 비 : 293억원(국 3, 도 70, 시 220)

◦ 공 정 률 : 5%(건축기획 용역 추진 중)

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2019년까지	2020년 이후	비 고
계	293	44	249
국 비	3		3
도 비	70		70
시 비	220	44	176
기 타

사업진행 현황

◦ 기본계획 용역 수립	: 2018.  4.

◦ 타당성 조사 용역 추진	: 2018. 11.

◦ 선소테마영상전시관 균특 예산 확보(국 2.75억원)	: 2018. 12.

◦ 중앙투자심사 재상정(18년 2차․3차,19년 1차․3차)	: 2020.  1.

◦ 중앙투자심사 승인(조건부)	: 2020.  4. 3.

◦ 건축기획 용역 예산 확보(1억원)	: 2020.  6.

◦ 건축기획 용역 계약 의뢰	: 2020.  7. 1.

위 치 도

전경사진 (조감도)

8		어르신 문화체육센터 신축

노인장애인과 이순영(684-6007)

실태		□ 고령사회 대비 다양한 노인복지 욕구에 맞는 건강하고 활기찬 여가문화 생활을 즐길 수 있는 노인 전용 체육시설 구축 필요
추진방향		□ 보편적 다수 노인들을 위한 교육･문화･체육･오락이 함께 어우러진 복합 문화공간으로 체육시설 건립
기대효과		□ 100세 시대에 발맞춘 맞춤형 서비스 제공으로 시민 삶의 질 및 복지 체감도 향상

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 웅천동 1820-2번지(☎684-6007)

◦ 사업기간 : 2016. 4. ~ 2019. 3. 29.

◦ 사업규모 : 4,500㎡(연면적 2,727.20㎡/지상 3층)

◦ 사 업 비 : 97.2억원(국비 20, 시비 77.2)

◦ 공 정 률 : 90％

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2019년까지	2020년 이후	비 고
계	97.2	97.2
국 비	20	20
도 비
시 비	77.2	77.2
기 타

사업진행 현황

◦ 어르신 다목적체육센터 건립 계획           : 2016.  4. 14.

◦ 기본 및 실시설계 용역                     : 2017.  5. ∼ 11.

◦ 용역 준공                                 : 2017. 11. 17.

◦ 조달청 계약의뢰                           : 2017. 11. 22.

◦ 공사계약                                  : 2017. 12. 15.

◦ 착공                                      : 2017. 12. 21.

◦ 준공                                      : 2019.  3. 29.

◦ 체육시설 개방 및 여가 프로그램 운영                  : 2019.  7. 12. ~

위 치 도

전경사진 (조감도)

9		웅천 ~ 소호 도로 개설

도로과 유재영(659-4071)

실태		□ 웅천택지개발사업 준공으로 시가지 도로의 교통 정체가 극심함에 따라 웅천에서 소호구간을 해상교량으로 연결하여 교통량을 분산시켜 교통소통 원활을 기하고자 함
추진방향		□ 도로개설 L=1,154m, B=22.5~26m(4차로)
기대효과		□ 웅천택지 준공에 따른 시가지 교통체증 해소 및 차량분산으로 인한 시가지 교통소통 원활

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 웅천동~소호동

◦ 사업기간 : 2018. 7. 30. ~ 2022. 7. 28.

◦ 사업규모 : L=1,154m, B=22.5~26.0m(4차로)

교량 L=550m(사장교 220m, PSC빔교 330m)

◦ 사 업 비 : 678.73억원

◦ 공 정 률 : 35.97%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2019년까지	2020년 이후	비 고
계	678.73	353.93	324.80
국 비
도 비
시 비	678.73	353.93	324.80
기 타

사업진행 현황

◦ 노선결정(해상교량 형식)	: 2015. 11. 24.

◦ 기본계획 및 측량용역 완료	: 2016. 12. 16.

◦ 일괄입찰 공고(조달청)	: 2017.  4. 20.

◦ 실시설계 적격자 선정(조달청)	: 2017. 10. 13.

◦ 실시설계 완료	: 2018.  3. 11.

◦ 도시관리계획(도로) 결정 변경 및 지형도면 고시	: 2018.  7.  5.

◦ 시설공사 착공	: 2018.  7. 30.

◦ 시설공사 준공	: 2022.  7. 28.

위 치 도(계획평면도)

전경사진

10		신기동 공영주차장 신축

교통과 윤창열(659-4149)

실태		□ 흥국상가 주차 공간 부족에 따른 상가 주변 불법 주정차 해소로 상가 이용 활성화 및 정주여건 개선
추진방향		□ 주차전용건축물 신축
기대효과		□ 상가 밀집지역의 주차난 해소와 불법 주정차 예방

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 신기동 112-1번지 일원

◦ 사업기간 : 2019. 4. ∼ 2021. 7.

◦ 사업규모 : 주차전용건축물 신축(연면적 3,911㎡, 지상2층, 주차157면)

◦ 사 업 비 : 78억원(보상비 37억원, 공사비 41억원)

◦ 공 정 률 : 10%(보상진행 중)

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2019년까지	2020년 이후	비 고
계	78	5.8	72.2
국 비	20	5.79	14.21
도 비
시 비	58	0.1	57.9

사업진행 현황

◦ 지방재정투자심사(전라남도) 반영	: 2018.  6.  27.

◦ 2019년 국고보조금 확정(10억)	: 2018.  8.  30.

◦ 도시관리계획(주차장, 도로) 결정(변경)	: 2018. 12.  27.

◦ 실시설계 용역 착수	: 2019.  4.  15.

◦ 주민설명회 개최	: 2019.  6.  14.

◦ 보상협의 추진(1~3차)	: 2019.  6.~ 10.

- 보상대상자 8명(소유자 3, 세입자 5) / 보상액 56백만원(세입자 2 보상완료)

◦ 기본계획 변경	: 2019.  7.  5.

- 당초 : 지상3층, 연면적 4,051㎡, 152대 → 변경 : 지상2층, 연면적 3,924㎡, 163면

◦ 중앙토지수용위원회 실시계획 인가	: 2019. 11.  26.

위 치 도

기본계획(안)

사업부지 확대

우회도로 개설

전경사진 (조감도)

11		서교지구 행복주택 건설

허가민원과 신현식(659-4098)

실태		□ 서민의 주거안정 및 주거수준 향상을 도모하여 쾌적한 주거생활 도모
추진방향		□ 200세대(아파트 1개동, 지상 23층) 건설
기대효과		□ 주거안정 및 구도심 지역에 인구유입을 통한 지역경제 활성화 유도

사 업 개 요

◦ 위    치 : 서교동 153번지 등 33필지

◦ 사업기간 : 2017. 9. ~ 2021. 9.

◦ 사업규모 : 200세대(아파트 1개동, 지상 23층)

◦ 사 업 비 : 231억원(시비 31 LH 200)

◦ 공 정 률 : 13%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2019년까지	2020년 이후	비 고
계	231	31	200
국 비	200		200
도 비
시 비	31	31
기 타

사업진행 현황

◦ 행복주택 후보지 선정(국토교통부)	: 2016. 9. 13.

◦ 주택건설사업계획 승인(국토교통부)	: 2018. 1.  3.

◦ 토지 및 지장물 보상 완료(21건, 649백만원)    : 2019. 1.   .

◦ 지장물 철거 및 페기물 처리                   : 2019. 9. 11.

◦ 착  공                                       : 2019. 5. 16.

위 치 도

전경사진 (조감도)

12		소제지구 택지개발

공영개발과 곽원(659-4575)

실태		□ 국가산단 증설에 따른 신규유입 산단 종사자에게 주거지 제공 필요
추진방향		□ 경관이 탁월한 지역에 택지를 조성하여 양질의 주거지 제공
기대효과		□ 양질의 주거지 제공으로 외부 인구유출 방지

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 소호동 소제마을 일원

◦ 사업기간 : 2016년 ~ 2023년

◦ 사업규모 : 택지개발 A=418천㎡

◦ 사 업 비 : 1,834억원

◦ 공 정 률 : 5%(보상중)

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2019년까지	2020년 이후	비 고
계	1,834	1,017	817
국 비
도 비
시 비	1,834	1,017	817
기 타

사업진행 현황

◦ 여수국가산업단지 지정고시	: 1974.  4.  1.

◦ 개발계획 변경 승인(전라남도)	: 2018.  6. 21.

◦ 보상계획 열람공고	: 2019.  1. 24.

◦ 감정평가완료 및 보상개시	: 2019.  6. 17.

◦ 실시계획변경승인	: 2020.  6. 25.

◦ 공사착수	: 2020. 10. 30.

◦ 공사준공	: 2023. 12. 30.

위 치 도

전경사진 (조감도)

13		둔덕정수장 고도정수처리시설 설치사업

상수도과 정상기(659-4909)

실태		□ 병원성 미생물 등을 제거할 수 있는 첨단 고도정수처리공법 적용 필요
추진방향		□ 고도정수처리시설(막여과) 설치 Q=92,000㎥/일, 정배수지 Q=7,200㎥/일
기대효과		□ 첨단 막여과 고도정수처리시설 도입으로 시민에게 깨끗한 수도 공급 □ 노후된 기존 정수처리시설 현대화로 미래 안정적인 수도 기반 시설 확충

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 좌수영로 493-10(둔덕정수장 내)

◦ 사업기간 : 2019. 6. 17. ~ 2023. 6. 15.

◦ 사업규모 : 고도정수처리시설(막여과) Q=92,000㎥/일, 정배수지 Q=7,200㎥/일

◦ 사 업 비 : 423억원

◦ 공 정 률 : 20%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2019년까지	2020년 이후	비 고
계	423	83	340
국 비	225	59	166
도 비	22	1	21
시 비	176	23	153
기 타

사업진행 현황

◦ 기본 및 실시설계 완료	: 2014.  6. 18.

◦ 막여과 물품구매 계약체결	: 2018. 10. 25.

◦ 총괄 및 1차분 착공	: 2019.  6. 17.

◦ 2차분 착공	: 2019. 12. 17.

◦ 1차분 준공 예정	: 2020.  7. 20.

◦ 2차분	준공 예정	: 2020. 12. 17.

◦ 총괄분 준공 예정	: 2023.  6. 15.

위 치 도

전경사진 (조감도)

14		돌산읍 우두리 하수도 중점관리지역 정비사업

하수도과 박채원(659-4993)

실태		□ 저지대인 우두리 일원은 바닷물 만조와 집중호우가 겹칠 시 침수피해 발생
추진방향		□ 정비대책에 따른 빗물펌프장, 유수지 설치 및 관로정비 추진
기대효과		□ 침수피해를 예방하여 주민불편 및 사유재산 보호

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 돌산읍 우두리 1181번지 일원

◦ 사업기간 : 2017. 11. 30. ~ 2020. 11. 19.

◦ 사업규모 : 빗물펌프장 1,500㎥/분, 유수지 14,000㎥, 관로정비 5.1㎞

◦ 사 업 비 : 316억원(국비 221, 시비 95)

◦ 공 정 률 : 74%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2019년까지	2020년 이후	비 고
계	316	316
국 비	221	221
도 비
시 비	95	95
기 타

사업진행 현황

◦ 하수도 중점관리지역 지정(환경부)            : 2013. 12. 26.

◦ 기본 및 실시설계용역 완료                   : 2016. 12. 22.

◦ 중점관리지역 정비대책 승인(환경부)          : 2015. 11. 11.

◦ 총괄 및 1차분 계약, 착공                    : 2017. 11. 30.

◦ 2차분 착공                                  : 2018. 11. 19.

◦ 3차분 착공                                  : 2019.  4. 30.

◦ 전기 및 계측제어공사 착공                   : 2019.  5.  7.

◦ 소방, 통신공사 착공                         : 2019.  6. 20.

위 치 도

전경사진 (조감도)