정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	여수국가산단 노동자 복합문화센터 및 공동세탁소 건립사업
② 추진배경	산단 노동자들이 문화, 복지, 편의 기능을 한 곳에서 쉽게 접할 수 있는 복합문화센터와 공동세탁소를 건립하여 노동자 편익증진과 근로의식 고취
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2021. ∼ 2026. ○ 위 치 : 여수시 주삼동 1038-1번지(국가산업단지, 미래혁신지구) ○ 총사업비 : 123억 원(국비 35, 도비 4.5, 시비 83.5) - [복합문화센터] 113억 원(국비 35, 도비 4.5, 시비 63.5) - [공동세탁소] 공동세탁소 10억 원(시비) ○ 규 모 : 대지면적 2,517.9㎡(762평) - [복합문화센터] 지상6층, 연면적 2,540.14㎡ - [공동세탁소] 지상1층, 연면적 335.26㎡ ○ 사업내용 : 편의점, 북카페, 골프연습장, 다목적강당, 건강지원센터 등 ○ 사업주체 : (주관)산업통상자원부, (전담)한국산업단지공단, (수행)전라남도, 여수시
④ 사업부서	여수시 산업지원과		⑤ 담당자	행정5급 조인천 행정6급 조계인 시설8급 김평순
⑥ 선정기준	10억 이상 사업		⑦ 사업기간	2021. ~ 2026.
<그간 주요 추진내용>
○ 기본계획 수립 용역 완료 ※ 산업지원과-12139		‘20. 12. 15.	김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 건립계획 방침결정(공모 계획) ※ 산업지원과-468		‘21. 1. 12.	권오봉 시장 서은수 부시장 김병완 국장 김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 여수시 지방재정영향평가 심사 완료 ※ 기획예산과-3868, 산업지원과-2227		‘21. 2. 22.	김태완 과장 김용우 팀장 정민호 차장 박재연 주무관
○ 정부합동 공모 신청 및 선정 ※ 산업지원과-2372, 산업지원과-4498		‘21. 3. 2. ‘21. 4. 23.	서은수 부시장 김병완 국장 김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 공모 선정위원회 참석, 발표 ※ 산업지원과-4330			김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 관계기관 간 업무 협약체결 및 사업비 지급 ※ 한국산업단지공단 융복합산단-1862 산업지원과-6402, 산업지원과-6010		‘21. 6. 11.	김병완 국장 김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 여수시 공유재산심의회 심의 완료 ※ 회계과-32503, 산업지원과-6673		‘21. 6. 21.	김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 전남도 지방재정투자사업 심사 완료 ※ 전라남도 예산담당관-7914, 기획예산과-13971, 산업지원과-8114		‘21. 7. 27.	김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 세부 추진계획(안) 방침결정 ※ 산업지원과-9662 (공동세탁소 설계 용역 및 복합문화센터 공공건축 기획 용역 시행)		‘21. 9. 6.	권오봉 시장 박현식 부시장 박은규 국장 김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 공동세탁소 설계 용역 계약체결 ※ 회계과-54344, 산업지원과-11787		‘21. 11. 2.	김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 복합문화센터 건축기획 용역 계약체결 ※ 회계과-54851, 산업지원과-11899		‘21. 11. 4.	김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 공동세탁소 용역 착수보고회 개최 ※ 산업지원과-13195		‘21. 11. 30.	박은규 국장 김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 복합문화센터 건축기획 용역 일시정지 검토 ※ 산업지원과-13229		‘21. 12. 7.	박은규 국장 김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 공유재산 유상이관 완료 ※ 산업지원과-13690		‘21. 12. 7.	김태완 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 공동세탁소 용역 중간보고회 개최 및 용역 일시정지 검토 ※ 산업지원과-2349		‘22. 2. 18.	박은규 국장 고영준 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 「여수국가산단 노동자 작업복 공동세탁소 건립」공사 시행 ※ 산업지원과-7556		‘22. 7. 5.	박현식 부시장 박은규 국장 고영준 과장 김용우 팀장 박재연 주무관
○ 「여수국가산단 노동자 작업복 공동세탁소 건립」공사(건축·기계) 외 2건 계약의뢰 ※ 산업지원과-8866		‘22. 8. 5.	고영준 과장 노기섭 팀장 김형민 팀장 임선규 주무관
○ 「여수국가산단 노동자 작업복 공동세탁소 건립」건축물 축조 협의 ※ 산업지원과-9709		‘22. 8. 26.	고영준 과장 노기섭 팀장 정효진 주무관 임선규 주무관
○ 「여수국가산단 노동자 작업복 공동세탁소 건립」공공폐수처리시설 유입처리 승인서 제출 ※ 산업지원과-9939		‘22. 8. 31.	고영준 과장 노기섭 팀장 임선규 주무관
○ 「여수국가산단 노동자 작업복 공동세탁소 건립」공사(건축·기계) 일시정지 검토보고 ※ 산업지원과-10585		‘22. 9. 16.	김병완 국장 고영준 과장 노기섭 팀장 류태원 주무관
○ 「여수국가산단 노동자 작업복 공동세탁소 건립」공사(건축·기계) 외 2건 일시정지 요청 ※ 산업지원과-10665		‘22. 9. 18.	고영준 과장 노기섭 팀장 류태원 주무관
○ 「여수국가산단 노동자 작업복 공동세탁소 건립」공사(건축·기계) 감리 용역 시행 ※ 산업지원과-10666		‘22. 9. 18.	고영준 과장 노기섭 팀장 류태원 주무관
○ 「여수국가산단 노동자 작업복 공동세탁소 건립」공사(건축·기계) 감리 용역 계약 체결 의뢰 ※ 산업지원과-10734		‘22. 9. 19.	고영준 과장 노기섭 팀장 류태원 주무관
○ 「여수국가산단 노동자 작업복 공동세탁소 건립」공사(건축·기계) 기술지도 용역 시행 ※ 산업지원과-10738		‘22. 9. 19.	고영준 과장 노기섭 팀장 류태원 주무관
○ 「여수국가산단 노동자 작업복 공동세탁소 건립」공사(건축·기계) 외 2건 일시정지 해지 검토 보고 ※ 산업지원과-10738		‘22. 10. 7.	김병완 국장 고영준 과장 노기섭 팀장 류태원 주무관
○ 여수시 산단노동자 작업복 공동세탁소 수탁기관 선정결과 공고 ※ 산업지원과-11706		‘22. 10. 7.	고영준 과장 김형민 팀장 안주혜 주무관
○「여수국가산단 노동자 작업복 공동세탁소 건립」공사 감리 용역 계약체결 ※ 회계과-47843, 산업지원과-11696		‘22. 10. 11.	고영준 과장 노기섭 팀장 류태원 주무관
○「여수국가산단 노동자 작업복 공동세탁소 건립사업」기본 및 실시설계용역 준공 ※ 산업지원과-11696		‘22. 11. 29.	고영준 과장 노기섭 팀장 류태원 주무관
○「여수국가산단 노동자 작업복 공동세탁소 건립사업」기본 및 실시설계용역 준공 ※ 산업지원과-11696		‘22. 11. 29.	고영준 과장 노기섭 팀장 류태원 주무관
○「여수국가산단 노동자 작업복 공동세탁소 건립」공사(건축‧기계) 변경계약 체결 ※ 회계과-60137, 산업지원과-14681		‘22. 12. 14.	고영준 과장 노기섭 팀장 류태원 주무관
○ 여수시 산단노동자 작업복 공동세탁소 명칭 공모 공고 ※ 산업지원과-14969		‘22. 12. 21.	고영준 과장 김형민 팀장 안주혜 주무관
○ 공공건축 사업계획 사전검토 요청 (여수국가산단 노동자 복합문화센터 건립사업) ※ 산업지원과-15120		‘22. 12. 23.	고영준 과장 노기섭 팀장 류태원 주무관
○ 여수국가산단 노동자 작업복 공동세탁소 건립공사 공사기간 연장 ※ 회계과-1555, 산업지원과-371		‘23. 1. 18.	고영준 과장 노기섭 팀장 류태원 주무관
○ 여수시 산단노동자 작업복 공동세탁소 명칭 공모 수상작 선정 결과 공고 ※ 산업지원과-1250		‘23. 2. 6.	고영준 과장 김형민 팀장 안주혜 주무관
○ 여수국가산단 노동자 복합문화센터 건립사업 공공건축 사업계획 사전검토 의견서 통지 ※ 산업지원과-1388		‘23. 2. 8.	고영준 과장 노기섭 팀장 류태원 주무관
○ 여수 국가산단 노동자 작업복 공동세탁소 건립공사(건축·기계) 변경계약 ※ 회계과-6651, 산업지원과-1946		‘23. 2. 22.	고영준 과장 노기섭 팀장 류태원 주무관
○ 여수국가산단 노동자 복합문화센터 건립사업 공공건축 기획심의 신청 ※ 산업지원과-3069		‘23. 3. 14.	고영준 과장 노기섭 팀장 김형민 팀장 안주혜 주무관 류태원 주무관
○ 여수국가산단 노동자 작업복 공동세탁소 건립공사(건축·기계) 변경계약 ※ 회계과-10419, 산업지원과-3082		‘23. 3. 15.	고영준 과장 노기섭 팀장 류태원 주무관
○ 여수국가산단 노동자 복합문화센터 건립사업 총사업비 변경 검토보고 ※ 산업지원과-3904		‘23. 3. 30.	정기명 시장 김종기 부시장 김용필 국장 고영준 과장 박혜경 팀장 류태원 주무관
○ 2023년 제1회 여수시 건축계획전문위원회 개최 결과 알림(원안가결) ※ 허가과-13307, 산업지원과-4491		‘23. 4. 12.	고영준 과장 박혜경 팀장 류태원 주무관
○ 여수국가산단 노동자 작업복 공동세탁소 건립공사(통신) 준공 ※ 산업지원과-4858		‘23. 4. 19.	고영준 과장 박혜경 팀장 류태원 주무관
○ 여수국가산단 노동자 작업복 공동세탁소 건립공사(건축·기계) 변경계약 ※ 회계과-18722, 산업지원과-5258		‘23. 4. 27.	고영준 과장 박혜경 팀장 류태원 주무관
○ 여수국가산단 노동자 작업복 공동세탁소 건립공사(건축·기계) 준공 ※ 산업지원과-6286		‘23. 4. 28.	고영준 과장 박혜경 팀장 류태원 주무관
○ 여수국가산단 노동자 작업복 공동세탁소 건립공사(전기) 준공 ※ 산업지원과-5476		‘23. 4. 28.	고영준 과장 박혜경 팀장 류태원 주무관
○ 여수국가산단 노동자 작업복 공동세탁소 건립공사 감리 용역 완료 ※ 산업지원과-5557		‘23. 5. 3.	고영준 과장 박혜경 팀장 류태원 주무관
○ 여수국가산단 노동자 복합문화센터 건립 설계공모 계획 ※ 산업지원과-5796		‘23. 5. 10.	정기명 시장 김종기 부시장 김용필 국장 고영준 과장 박혜경 팀장 류태원 주무관
○ 여수국가산단 노동자 작업복 공동세탁소 ｢여수산단행복세탁소｣ 개소식 개최 알림 ※ 산업지원과-5910		‘23. 5. 12.	고영준 과장 김형민 팀장 류태원 주무관
○ 여수국가산단 노동자 복합문화센터 건립사업 설계공모 일상감사 결과 통보 ※ 감사담당관-6245, 산업지원과-7003		‘23. 6. 9.	고영준 과장 박혜경 팀장 류태원 주무관
○ 여수국가산단 노동자 복합문화센터 건립사업 설계공모 운영위원회 구성 및 심사위원 선정계획 ※ 산업지원과-7157		‘23. 6. 14.	김용필 국장 고영준 과장 박혜경 팀장 류태원 주무관
○ 여수국가산단 노동자 복합문화센터 건립사업 건축 설계공모 사전규격 공개 의뢰 ※ 산업지원과-9943		‘23. 8. 14.	고영준 과장 박혜경 팀장 류태원 주무관
○ 여수국가산단 노동자 복합문화센터 건립사업 건축 설계공모 공고 ※ 산업지원과-10132		‘23. 8. 18.	고영준 과장 박혜경 팀장 류태원 주무관
○ 여수국가산단 노동자 복합문화센터 건립사업 건축 설계공모 참가등록 및 현장설명회 결과보고 ※ 산업지원과-10773		‘23. 8. 31.	김용필 국장 고영준 과장 박혜경 팀장 류태원 주무관
○ 여수국가산단 노동자 복합문화센터 운영·활용 방안 수립 연구용역 추진 계획(안) ※ 산업지원과-11419		‘23. 9. 15.	김종기 부시장 김용필 국장 고영준 과장 김형민 팀장 김근하 주무관
○ 여수국가산단 노동자 복합문화센터 건립사업 설계공모 질의답변 안내 ※ 산업지원과-11763		‘23. 9. 21.	고영준 과장 박혜경 팀장 류태원 주무관
○ 여수국가산단 노동자 복합문화센터 및 공동세탁소 건립사업 건축기획 용역 준공계 ※ 산업지원과-11801		‘23. 9. 22.	고영준 과장 박혜경 팀장 류태원 주무관
○ 여수국가산단 노동자 복합문화센터 건립사업 건축 설계공모 심사위원회 세부 추진 계획 ※ 산업지원과-13621		‘23. 11. 6.	김용필 국장 고영준 과장 박혜경 팀장 김형민 팀장 정종완 주무관 류태원 주무관
○ 여수국가산단 노동자 복합문화센터 건립사업 건축 설계공모 심사결과 공고 ※ 산업지원과-13848		‘23. 11. 10.	고영준 과장 박혜경 팀장 류태원 주무관
○ 여수국가산단 노동자 복합문화센터 건립사업 건축 설계공모 심사위원회 결과 보고 ※ 산업지원과-14044		‘23. 11. 14.	김용필 국장 고영준 과장 박혜경 팀장 류태원 주무관
○ 여수국가산단 노동자 복합문화센터 건립사업 기본 및 실시설계 용역 계약체결 의뢰 ※ 산업지원과-14760		‘23. 12. 1.	고영준 과장 박혜경 팀장 류태원 주무관
○ 여수국가산단 노동자 복합문화센터 건립사업 기본 및 실시설계 용역 계약체결 및 감독공무원 지정 알림 ※ 회계과-61599, 산업지원과-14918		‘23. 12. 6.	고영준 과장 박혜경 팀장 류태원 주무관
○ 여수국가산단 노동자 복합문화센터 건립사업 기본 및 실시설계 용역 착수계 ※ 산업지원과-14985		‘23. 12. 6.	고영준 과장 박혜경 팀장 류태원 주무관
○ 여수국가산단 노동자 복합문화센터 건립사업 자문위원회 구성 검토 보고 ※ 산업지원과-565		‘24. 1. 12.	조계완 과장 박혜경 팀장 노명훈 주무관
○ 여수국가산단 노동자 복합문화센터 건립사업 기본 및 실시설계 용역 착수보고회 결과 보고 ※ 산업지원과-2070		‘24. 2. 13.	조계완 과장 박혜경 팀장 노명훈 주무관
○ 여수국가산단 노동자 복합문화센터 건립사업 협약변경 신청(전라남도 여수시) ※ 산업지원과-6923		‘24. 6. 5.	조계완 과장 박혜경 팀장 노명훈 주무관
○ 여수국가산단 노동자 복합문화센터 건립사업 기본 및 실시설계 용역 중간보고회 결과 보고 ※ 산업지원과-6969		‘24. 6. 5.	조계완 과장 박혜경 팀장 노명훈 주무관
○ 여수국가산단 노동자 복합문화센터 건립사업 기본 및 실시설계 용역 기성검사조서(1회) 제출 ※ 산업지원과-7832		‘24. 6. 26.	조계완 과장 박혜경 팀장 노명훈 주무관
○ 여수국가산단 노동자 복합문화센터 건립사업 기본 및 실시설계 용역 일시정지 검토 보고 ※ 산업지원과-8276		‘24. 7. 5.	나병곤 국장 조계완 과장 박혜경 팀장 노명훈 주무관
○ 여수국가산단 노동자 복합문화센터 건립사업 기본 및 실시설계 용역 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 신청서 등 송부 ※ 산업지원과-494		‘24. 7. 18.	조계완 과장 박혜경 팀장 노명훈 주무관
○ 여수국가산단 노동자 복합문화센터 건립사업 기본 및 실시설계 용역 준공예정일 알림 ※ 산업지원과-1069		‘24. 7. 31.	조계완 과장 박혜경 팀장 노명훈 주무관
○ 장애물 없는 생활환경(BF) 인증 보완도서 제출(여수국가산단 노동자 복합문화센터 건립사업) ※ 산업지원과-3088		‘24. 9. 24.	조계완 과장 박혜경 팀장 노명훈 주무관
○ 여수국가산단 복합문화센터 건립사업 변경 협약서 송부 ※ 산업지원과-3774		‘24. 10. 10.	조계완 과장 박혜경 팀장 노명훈 주무관
○ BF 인증 심의 위원회 개최 알림 ※ 산업지원과-3173		‘25. 3. 13.	조인천 과장 조계인 팀장 정상기 주무관
○ 여수국가산단 노동자 복합문화센터 우수유출저감대책 수립 용역 착수계 제출 ※ 산업지원과-4263		‘25. 4. 7.	조인천 과장 조계인 팀장 정상기 주무관
○ 여수국가산단 노동자 복합문화센터 우수유출저감대책 수립 용역' 준공계 제출 ※ 산업지원과-4885		‘25. 4. 21.	조인천 과장 조계인 팀장 정상기 주무관
○ 2021년 여수국가산단 복합문화센터 건립사업 재심의 평가의견 반영서 등 제출 ※ 산업지원과-6784		‘25. 6. 21.	조인천 과장 조계인 팀장 정상기 주무관
○ 여수국가산단 노동자복합문화센터 건립사업 재심의 결과에 따른 변경협약 시행 ※ 산업지원과-7254		‘25. 6. 24.	조인천 과장 조계인 팀장 정상기 주무관
○ 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증서 교부(여수국가산단 노동자 복합문화센터) ※ 산업지원과-7649		‘25. 7. 2.	조인천 과장 조계인 팀장 정상기 주무관
○ 2021년 여수국가 복합문화센터 건립사업 재심의 결과에 따른 변경협약 체결 안내 ※ 산업지원과-7724		‘25. 7. 3.	조인천 과장 조계인 팀장 정상기 주무관
○ 관급자재선정 심의위원회 심의 의뢰여수 국가산업단지 복합문화센터 건립사업 ※ 산업지원과-8850		‘25. 8. 5.	조인천 과장 조계인 팀장 김평순 주무관