정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	율촌 도성마을 경관 개선사업
② 추진배경	한센인 정착촌인 도성마을의 생활환경 및 마을경관을 개선하여 살기좋은 마을로 만들기 위함
③ 사업개요	○ 사 업 명 : 율촌 도성마을 경관 개선 공사 ○ 사업위치 : 여수시 율촌면 신풍리 41-26번지 일원(도성마을) ○ 사 업 량 : 담장보수 23개소, 지붕개량 11개소, 빈집철거 18개소, 지붕컬러링 25개소 ○ 사업내용 : 도성마을 경관을 정비하여 주민 생활환경 개선 ○ 사 업 비 : 1,000백만원
④ 사업부서	건축과	⑤ 담당자		시설9급 정다운 건축과장 김동호
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사	⑦사업기간		’21. 9. ～ ’23. 3.
<그간 주요 추진내용>
○ 농어촌 마을 경관 개선사업 선정(도→시) ※건축개발과-5246(2021. 3. 15.)			`21. 3.15.		박창배 과장 김인옥 팀장 박지홍 주무관
○ 실시설계용역 실시			`21. 9.30.		김동호 과장 김인옥 팀장 지상훈 주무관
○ 석면철거 공사 착공 ○ 석면폐기물 처리 용역 착수 ○ 석면비산정도측정비 용역 착수 ○ 건축공사 착공			`22.08.19. `22.08.19. `22.08.24. `22.08.31.		김동호 과장 최정일 팀장 정다운 주무관
○ 석면해체감리 용역 착수 ○ 건축공사 외 4건 일시정지			`22.09.01. `22.09.19.		김동호 과장 최정일 팀장 정다운 주무관

○ 석면조사 용역 완료	`22.10.26.	김동호 과장 최정일 팀장 정다운 주무관
○ 석면철거 공사 및 석면폐기물처리 용역 완료 ○ 석면해체 감리 및 석면비산정도측정 용역 완료	`22.12.15. `22.12.16.	김동호 과장 최정일 팀장 정다운 주무관
○ 마을 담장벽화 제작 관련 주민 설명회	`22.12.29.	김동호 과장 최정일 팀장 정다운 주무관
○ 건축공사 설계변경 검토 보고 ○ 건축공사 변경계약 의뢰	`23.2.14. `23.2.17.	김동호 과장 정미순 팀장 정다운 주무관
○ 건축공사, 건설폐기물처리용역 소각폐기물처리용역 준공	`23.3.24.	김동호 과장 정미순 팀장 정다운 주무관