특수공시

특수공시 사업 목록

(2022. 12. 31. 기준 / 단위 : 억 원)

사 업 명		총사업비	부 서 명	비 고
1.	진남배드민턴 전용구장 건립	99.5	체육지원과	완료(‘22. 11.)
2.	여수시립박물관 건립	293	문화유산과	35%
3.	도원사거리 일원 하수도중점 관리지역 침수예방사업	214	하수도과	25%
4.	성산공원 리모델링	68	공원과	완료(‘22. 10.)
5.	도시재생사업(주거지원형-문수지구)	236	도시재생과	80%
6.	소제지구 택지개발	2,150	공영개발과	42%
7.	남산공원 조성사업	300	공원과	90%
8.	미세먼지 차단숲 조성	100	공원과	완료(‘22. 12.)
9.	글로벌 스마트 관광도시 조성사업	70	관광과	완료(‘22. 9.)
10.	여수 생활문화센터 건립(생활SOC사업)	58	문화예술과	완료(‘22. 12.)
11.	산지수산물 유통물류센터 건립	53	수산경영과	완료(‘22. 9.)
12.	농업기술센터 종합실험 연구동 신축	58	기술보급과	85%
13.	웅천 장도공원 예술의 숲 조성	67	공원과	80%

1	진남배드민턴 전용구장 건립공사

체육지원과 김지아 (☏ 061-659-3268)

실태		□ 여수시 배드민턴 동호인(1,400여명)의 배드민턴 전용시설 건립 청원
추진방향		□ 배드민턴 전용 구장(12면) 및 샤워실 등의 체육 편의시설 신축
기대효과		□ 배드민턴 전용구장 건립에 따른 종목 역량 강화 및 생활체육 발전 기대 □ 시민 건강증진을 위한 생활 체육 인프라 구축 및 각종대회 유치를 통한 지역 경제 활성화 기여

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 진남체육관길 74(진남체육공원 내)

◦ 사업기간 : 2019. 1. ∼ 2022. 12.

◦ 사업규모 : 지상 2층/1동, 연면적 3,300㎡, 코트 14면

◦ 사 업 비 : 9,950백만원(균특 2,250, 특교 1,000, 도비 50, 시비 6,650)

◦ 공 정 율 : 100%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2021년까지	2022년	2023년 이후	비 고
계	99.5	43	56.5
국 비	22.5	12.5	10
도 비	0.5	0.5
시 비	66.5	20	46.5
기 타	10	10

사업진행 현황

◦ 지방재정 투자심사                              : 2018.  6. 11

◦ 공유재산관리계획 의결                          : 2019.  2. 22.

◦ 건축설계 공모 공고                             : 2019. 10. 28.

◦ 공모작 선정 및 설계용역 계약체결               : 2020.  2. 25.

◦ 기본 및 설계용역 착수                          : 2020.  3.  3.

◦ 건축공사(1차분) 착공                            : 2021.  1.  4.

◦ 공사 준공                                      : 2022. 11.  30.

위 치 도

전경사진 (조감도)

2	여수시립박물관 건립

문화유산과 소은애(☏ 061-659-4526)

실태		□ 지역문화유산의 체계적인 보존·연구·전시·교육 가능한 박물관 부재
추진방향		□ 지역민의 정체성 확립 및 지역문화 활성화 도모
기대효과		□ 지역민의 문화향유 기회 확대 및 관광자원화로 지역발전 기여

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 웅천동 1865-1번지 일원(이순신공원 내)

◦ 사업기간 : 2018. ∼ 2024.

◦ 사업규모 : 부지면적 33,000㎡, 지상1층(연면적 5,605.3㎡)

◦ 사 업 비 : 293억원(국비 37, 도비 64, 시비 192)

◦ 공 정 율 : 35%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2021년까지	2022년	2023년 이후	비 고
계	293	10.4	82.14	200.5
국 비	37	4	33
시도비	64			64
시 비	192	6.4	49.1	136.5

사업진행 현황

◦ 여수시립박물관 건립 기본계획수립 용역        : 2018. 10. ~ 2019. 3.

◦ 공립박물관 설립타당성 사전평가 통과          : 2019. 5. 1.

◦ 지방재정 중앙투자심사 조건부 승인            : 2019. 7. 2.

◦ 기본 및 실시설계용역                         : 2020. 12. ~ 2023. 6.

◦ 박물관 건립 관련 행정절차 이행	: 2022. 9. ~ 2024. 7.

◦ 지방재정 중앙투자심사(2단계심사완료)          : 2023. 6. 13.

◦ 건축공사 및 전시물 제작·설치                  : 2023. 8. ~ 2024. 12.

◦ 여수시립박물관 개관                           : 2025.

위 치 도

전경사진 (조감도)

3	도원사거리 일원 하수도 중점관리지역 침수예방사업

하수도과 담당자 (☏ 061-659-4991)

실태		□ 저지대인 도원사거리 일원은 바닷물 만조와 집중호우가 겹칠 시 침수피해 발생
추진방향		□ 정비대책에 따른 빗물펌프장, 유수지 설치 및 관로정비 추진
기대효과		□ 침수피해를 예방하여 시민안전 확보 및 사유재산 보호

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 학동, 안산동, 선원동 일원

◦ 사업기간 : 2021. 11. 9. ～ 2024. 12. 31.

◦ 사업규모 : 빗물펌프장 300㎥/분, 유수지 3,000㎥, 관로정비 4.2㎞

◦ 사 업 비 : 21,432백만원(국비 14,946, 시비 6,486)

◦ 공 정 율 : 25% (관로정비 중)

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	214.32	88.26	52.00	73.96
국 비	149.46	63.48	46.40	39.58
도 비
시 비	64.86	24.88	5.60	34.38
기 타

사업진행 현황

◦ 중점관리지역 지정․공고(환경부)	: 2017. 12.  4.

◦ 하수도정비대책 수립	: 2018.  3. ～ 2019. 6.

◦ 지방재정 투자심사	: 2018. 11.  9.

◦ 기본 및 실시설계용역	: 2019. 11. ～ 2021. 8.

◦ 지방건설기술심의, 재원협의 완료	: 2021.  4. 28.

◦ 공사계약 및 착공	: 2021. 11.  9.

위 치 도

전경사진 (조감도)

4	성산공원 리모델링 사업

공원과 담당자 (☏ 061-659-4623)

실태		□ 조성된 지 20여년이 경과한 공원으로, 산책로, 체육시설 등 시설물이 노후 됨.
추진방향		□ 노후된 공원을 리모델링하여 호수를 활용한 특색있는 공원으로 재조성
기대효과		□ 어르신과 어린이들이 함께 어울릴 수 있는 휴식공간 제공

사 업 개 요

◦ 위    치 : 화장동 949번지(성산공원)

◦ 사업기간 : 2020. 6. ∼ 2022. 12.

◦ 사업규모 : 공원 리모델링 A= 70,845㎡

- 인도교, 수변데크, 어린이물놀이장, 족구장 정비 등

◦ 사 업 비 : 68억원

◦ 공 정 율 : 100%(완료)

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	68	68
국 비
도 비
시 비	68	68
기 타

사업진행 현황

◦ 사업 계약체결 및 착공	: 2020.  6. 25.

◦ 1차분(인도교, 주차장 개보수) 완료	: 2021.  5. 26.

◦ 2차분(산책로 정비, 장미동산 확대 등) 완료	: 2021.  9.  4.

◦ 3차분(수변데크, 보도블럭 교체 등) 완료	: 2022.  5. 31.

◦ 4차분(물놀이시설, 체육시설 등) 및 총괄사업 완료    : 2022. 10. 31.

위 치 도

전경사진 (조감도)

5	도시재생사업(주거지원형-문수지구)

도시재생과 담당자 (☏ 061-659-4560)

실태		□ 노후화 된 주택밀집지역 및 기반시설 부족
추진방향		□ 기반시설정비 및 주택외관개선사업
기대효과		□ 공동체 인프라 구축, 자력 재생 활성화

사 업 개 요

◦ 위    치 : 문수동 59-20번지 일원(문수동 주택단지 일원)

◦ 사업기간 : 2019. ~ 2023. (5년)

◦ 사업규모 : 주택정비, 도로정비, 우·오수관 정비, 주차장 조성, 쌈지공원 조성

◦ 사 업 비 : 236억 원(마중물 168, 추가시비 68)

◦ 공 정 율 :  80%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	236	236	0	0
국 비	100	100
도 비	-	-
시 비	68	68
기 타	68	68

사업진행 현황

◦ 도시재생활성화계획 수립 승인, 고시	: ’19. 12. 31.

◦ 집수리 지원사업 추진	: ’20.  6. ~ ’22. 12.

◦ 연계사업 추진(상·하수도, 도시가스)	: ’21. 10. ~

◦ 어울림센터 신축공사 준공	: ’22.  6. 28.

◦ 한전지중화사업 추진	: ’21. 12. ～ ’23. 1.

◦ 보안등, CCTV, 주차장, 중심가로경관공사 준공      : ’22. 11. ～ ’23.  6.

위 치 도

전경사진 (조감도)

6	소제지구 택지개발사업

공영개발과 박성 (☏ 061-659-4575)

실태		□ ‘남해안 거점도시 미항 여수’ 르네상스 창출을 위한 정주공간 택지조성
추진방향		□ 국가산단 배후도시 개발로 시민들에게 쾌적한 주거지 제공 및 주택 품질이 향상된 명품 주거단지 건설
기대효과		□ 맞춤형 ․ 시민행복 정주공간 형성으로 시민의 삶의 질 향상, 인구 유출방지 및 유입 기여

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 소호동 637번지 일원

◦ 사업기간 : 2016. ～ 2024. (공사기간 등 고려 ‘25. 12. 연장 예정)

◦ 사업규모 : 택지개발 417,654천㎡

◦ 사 업 비 : 2,150억원(공사비 513, 보상비 1,355, 기타 282)

◦ 공 정 율 : 42%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	2,150	162	192	126
시 비	2,150	162	192	126

사업진행 현황

◦ 개발계획변경 승인(전라남도)	: ‘18.  6. 21.

◦ 손실보상 협의 및 보상비 지급	: ‘19.  6. ～

◦ 실시계획 변경승인(여수시)	: ‘20.  6. 25.

◦ 건설사업 관리용역 착수	: ‘20.  9. 18.

◦ 택지개발 공사(1차분) 시행	: ‘21. 4. 28.～’21. 12. 23.

◦ 택지개발 공사(2차분) 시행	: ‘22. 1.  7.～’23.  1.  6.

◦ 택지개발 공사(3차분) 착공	: ‘23.  1. 13.

◦ 개발(실시)계획 재수립 검토 T/F팀 구성 및 회의    : ‘23.   6. 12.～’25.

◦ 전체의원 간담회	: ‘23.   7. 10.

토지이용계획도

전경사진 (조감도)

7	남산공원 조성사업

공원과 차범찬 (☏ 061-659-4623)

실태		□ 종포해양공원 등 구도심과 바다를 조망할 수 있는 공원 조성
추진방향		□ 전망데크, 미로정원 등 조성으로 볼거리ㆍ즐길거리 제공
기대효과		□ 자연친화적 공간 활용으로 푸른 여수 상징 및 시민 휴식공간 제공

사 업 개 요

◦ 위    치 : 남산동 274번지 일원(남산공원)

◦ 사업기간 : 2012. 〜 2023.

◦ 사업규모 : 근린공원 조성(A= 174,323㎡)

◦ 사 업 비 : 300억원 [1단계 204(공사84, 보상120), 2단계 96(공사86, 보상 10)]

◦ 공 정 율 : 90%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	300	270	30
국 비
도 비
시 비	300	270	30
기 타

사업진행 현황

◦ 근린공원 결정고시(건교부 고시 제137호)             : ’76.  3. 27.

◦ 남산공원(1단계) 조성사업 준공                      : ’17. 11. 24.

*1단계(’12.〜’17.): 진입도로 L= 427m, 주차장 A= 3,388㎡(100면)

◦ 현장간담회, 설문조사 등 공원조성 방향 의견 수렴    : ’18. 7.∼’19. 1.

◦ 남산공원(2단계) 조성사업 착공                      : ’20.  6. 25.

*종합 공정율 90% (2022년 기준)

위 치 도

전경사진 (조감도)

8	미세먼지 차단숲 조성

공원과 차범찬 (☏ 061-659-4623)

실태		□ 산단에서 발생되는 미세먼지를 차단(저감) 시키는 녹지공간 조성 필요
추진방향		□ 공원, 녹지대 등에 미세먼지 차단(저감)용 다열복층림 구조의 숲 조성
기대효과		□ 미세먼지 차단 숲 조성으로 시민 건강증진 및 녹색 휴식공간 제공

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 소라면 덕양리 1412-24번지 일원 등

(양지바름공원 등 5개소)

◦ 사업기간 : 2020. 1 ～ 2022. 12

◦ 사업규모 : 미세먼지 차단숲 조성 A=10ha

◦ 사 업 비 : 100억원

◦ 공 정 율 : 100%(완료)

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	100	100
국 비	50	50
도 비
시 비	50	50
기 타

사업진행 현황

◦ 2020년 사업 착공 (A=3ha / 양지바름공원)                      : 2020.  8.

◦ 2020년 사업 준공                                             : 2021.  4.

◦ 2021년 사업 착공 (A=7ha / 4개사업장)                         : 2021.  5.

◦ 2021년 사업 3개지구 준공 (A=4.9ha)	: 2021. 11.

◦ 2021년 사업 잔여 1개지구 준공 (A=2.1ha) 및 총괄준공          : 2022. 12.

위 치 도

율촌제1일반산업단지

율촌산단 미세먼지

차단숲 조성지

전경사진 (조감도)

9	여수시 글로벌 스마트 관광도시 조성사업

관광과 김유양 (☏ 061-659-3996)

실태		□ 코로나 시대 관광시장 재편으로 인해 새로운 관광 콘텐츠 개발 필요
추진방향		□ ICT융복합 기술을 적용한 관광 편의성과 스마트 관광서비스 인프라 제공하고, 다양한 관광 콘텐츠를 접목한 스마트 관광도시 육성
기대효과		□ 여행객의 수요 맞춤형 콘텐츠와 소비 결과의 즉각적인 피드백 기반으로 관광생태계 선순환 사이클 조성

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 일원

◦ 사업기간 : 2021. 11. ～ 2022. 12.

◦ 사업규모 : 종포해양공원 일원 1.5km/ 이순신광장～여수해양공원

◦ 사 업 비 : 70억 원(국비 35, 도비 7, 시비 28)

◦ 공 정 율 : 100%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	70	70	0	0
국 비	35	35	0	0
도 비	7	7	0	0
시 비	28	28	0	0
기 타	0	0	0	0

사업진행 현황

◦ 행정절차(사전정보화 협의, 보안성 검토 등) 이행  : 2022. 2. ～ 3.

◦ 계약 체결(여수시⇔컨소시엄사)                  : 2022. 4. 18.

◦ 글로벌 스마트관광도시 출범식                   : 2022. 10. 26.

◦ 최종보고회 개최                               : 2022. 11. 23.

◦ 사업준공                                      : 2022. 12. 9.

위 치 도

전경사진 (조감도)

10	여수 생활문화센터 건립(생활SOC사업)

문화예술과 안준성 (☏ 061-659-4754)

실태		□ 시민을 위한 생활문화공간 필요성 대두
추진방향		□ 공동육아나눔터, 동아리실, 다목적실, 연습실 등 4층 규모
기대효과		□ 시민이 자유롭게 이용할 수 있는 생활문화공간 제공

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 흥국로 17(학동)

◦ 사업기간 : 2020. 8. ∼ 2022. 12.

◦ 사업규모 : 지하1층, 지상 4층 / 1동, 부지 698㎡, 연면적 1,679㎡

◦ 사 업 비 : 5,808백만원(국비 900, 특교세 756, 시비 4,152)

◦ 공 정 율 : 100%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 백만 원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	5,808	5,808
국 비	1,656	1,656
도 비
시 비	4,152	4,152
기 타

사업진행 현황

○ 생활SOC 공모사업 선정(균형위)                : ’19. 10.  2.

○ 건축 설계공모, 기본 및 실시설계 용역          : ’20.  8. ∼ ’21.  7.

○ 공사 계약 및 착공                            : ’21.  9. 30.

○ 준공                                         : ’22. 12. 19.

위 치 도

전경사진 (조감도)

11	산지수산물 유통물류센터 건립사업

수산경영과 담당자 유경희(☏ 061-659-3912)

실태		□ 수산물 유통분야의 시설 노후화 및 산업의 영세성 등으로 간편식품 수요증가, 안전식품 중시하는 소비패턴 등 유통변화 대응에 한계
추진방향		□ 절단·소분포장 등 상품 다양화, 처리물량 규모화등으로 원가 절감 및수산물 유통단계 축소 등을 통한 수산물 안정적 판로 확보
기대효과		□ 수산물의 수집, 보관, 판매, 분산 기능으로 안정적인 가격 형성과 수산물 판로 확보로 수산업 활성화에 기여 □ 자연재해(적조, 이상수온 등) 발생 시 양식어류 긴급수매 및 보관 기능으로 양식어가 피해 예방 최소화

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 남면 화태리 419-8번지 외 5필지

◦ 사업기간 : 2020. ∼ 2022.

◦ 사업규모 : 1,924.8㎡

◦ 사 업 비 : 5,315백만원(도비 2,000, 시비 1,400, 자담 1,915)

◦ 공 정 율 : 100 %

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2021년까지	2022년	2023년 이후	비 고
계	53.15	24.36	28.79
국 비
도 비	20	11.3	8.70
시 비	14	9.41	4.59
기 타	19.15	3.65	15.50

사업진행 현황

◦ 지방재정투자심사	: ‘20. 5. 7.

◦ 사업자선정	: ‘20. 7. 1.

◦ 실시설계용역 추진          : ‘20. 8. 18. ~ 12.31.

◦ 보조금 교부결정            : ‘21. 7. 9.

◦ 시공사 선정 및 계약        : ’21. 8. 11.

◦ 사업착공                   : ‘21. 8. 23.

◦ 사업준공                   : ’22. 9. 22.

위 치 도
전경사진

12	농업기술센터 종합 실험·연구동 신축

기술보급과 담당자 김철순

(☏ 061-659-4472)

실태		□ 농업기술센터 내 산재된 과학영농시설에 의한 농업인 불편 및 노후화된 실험기자재로 인한 서비스질 하향
추진방향		□ 과학영농 전용시설 통합·확대 신축 및 최신 분석장비 도입을 통한 첨단 과학영농지원 시스템 구축
기대효과		□ 농산물 품질·안전성 관리체계 구축에 따른 지역 농산물 이미지 제고 및 선순환체계 확립

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 주동1길 32(농업기술센터 내)

◦ 사업기간 : 2020. ∼ 2024.(5년간)

◦ 사업규모 : 986㎡(3층/1개동)

◦ 사 업 비 : 5,810백만원

◦ 공 정 율 :  85%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	58.10	36.80	16.30	5.00
국 비	22.61	17.61	2.50	2.50
도 비	4.40		4.40
시 비	31.09	19.19	9.40	2.50
기 타

사업진행 현황

◦ 종합 실험·연구동 신축 방침결정              : 2020.  2. 28.

◦ 종합 실험·연구동 착공                       : 2021.  12. 15.

◦ 농산물안전분석실 운영사업 선정(’23∼’24/ 국비 5억원)   : 2022.  9. 5.

◦ 종합 실험·연구동 준공                       : 2022.  11. 15.

◦ 과학영농지원 분석장비 및 실험기자재 구입·운용   : 2023.  1. ∼ 12.

◦ 농산물안전분석실 추가 장비구입 및 시험운영  : 2024.  1. ∼ 12.

위 치 도

전경사진

13	웅천 장도공원 예술의 숲 조성

공원과 강희철 (☏ 061-659-4627)

실태		□ 도심 인근에 시민들이 방문할 수 있는 특색있는 공원 필요
추진방향		□ 섬․숲 문화예술이 함께 공존하는 명품 공원 조성
기대효과		□ 해양 예술숲 조성으로 시민 건강증진 및 녹색 휴식공간 제공

사 업 개 요

◦ 위    치 : 여수시 웅천동 1902번지(웅천 장도공원)

◦ 사업기간 : 2021. 1 ∼ 2023. 12

◦ 사업규모 : 예술의 숲 조성 1식(A=92,865㎡)

◦ 사 업 비 : 67억원

◦ 공 정 율 : 80%

<연도별 사업비 투자현황>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2022년까지	2023년	2024년 이후	비 고
계	67	47	20
국 비	2	2
도 비	20	11	9
시 비	45	34	11
기 타

사업진행 현황

◦ 웅천 장도공원 예술의 숲 조성 방침 결정              : 2020.  4.

◦ 업무협약식 개최(전남도, 여수시, GS칼텍스)           : 2020.  7.

◦ 2021년 사업 추진(3건 11억원)                             : 2021.  1.～12.

◦ 2022년 사업 추진(4건 16억원)                             : 2022.  7.～11.

◦ 2023년 웅천 장도 예술의숲 조성                           : 2023.  4.～10.

위 치 도

전경사진 (조감도)