정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	죽림 및 심곡배수지 증설공사
② 추진배경	죽림지구 도시개발 사업 및 소제지구 택지개발사업에 따른 장래 증가되는 급수수요에 대비하여 죽림지구 및 소제지구 지역 내 상수도 용수를 안정적으로 공급
③ 사업개요	○ 위 치: 소라면 죽림리, 소호동 일원 ○ 사 업 량: 배수지(V=6,300㎥) 증설(죽림 3,900, 심곡 2,400), 가압장 각 1개소, 송배수관로 L= 5.3㎞ ○ 사 업 비: 171억원
④ 사업부서	여수시 상수도과		⑤ 담당자	시설7급 한상범 시설5급 이광재
⑥ 선정기준	10억 원 이상 공사		⑦ 사업기간	’21.∼’25.
<그간 주요 추진내용>
○ 기본 및 실시설계 용역 추진계획 ※ 상수도과-4336호		‘21. 3. 3.	권오봉 시장 서은수 부시장 김지선 단장 오정환 과장 전명수 팀장 김용환 주무관
○ 기본 및 실시설계 용역 계약심사 요청 ※ 상수도과-4366호		‘21. 3. 3.	오정환 과장 전명수 팀장 김용환 주무관
○ 계약심사 결과 알림 ※ 회계과-11170호		‘21. 3.11.
○ 용역사업 집행계획 및 사업수행능력평가서 제출안내 공고의뢰 ※ 상수도과-6040호		‘21. 3. 26.	오정환 과장 전명수 팀장 김용환 주무관
○ 사업수행능력평가 결과 보고 ※ 상수도과-8596호		‘21. 4. 29.	김지선 단장 오정환 과장 전명수 팀장 김용환 주무관
○ 기본 및 실시설계용역 계약체결 의뢰 ※ 상수도과-9344호		‘21. 5. 11.	오정환 과장 전명수 팀장 김용환 주무관
○ 기본 및 실시설계용역 계약체결 및 감독공무원 지정 ※ 수도행정과-6373호		‘21. 6. 16.

○ 기본 및 실시설계 용역 중간보고회 개최결과 보고 ※ 상수도과-4336호	‘21. 12. 23.	오정환 과장 홍종옥 팀장 강호권 주무관
○ 설계 경제성검토(VE)용역 등 4건 시행계획 보고 ※ 상수도과-6881호	‘22. 3. 25.	김지선 단장 주영근 과장 홍종옥 팀장 임영수 주무관
○ 설계 경제성검토용역 외 3건 계약체결 및 감독공무원 통보 ※ 수도행정과-4346호	‘22. 4. 12.
○ 일반수도사업 인가 신청 관련 사전협의 ※ 상수도과-10742호	‘22. 5. 11.	주영근 과장 홍종옥 팀장 임영수 주무관
○ 도로점용(굴착) 사업계획서 제출 ※ 상수도과-10987호	‘22. 5. 13.	주영근 과장 홍종옥 팀장 임영수 주무관
○ 도로점용(굴착) 허가 신청 ※ 상수도과-12544호	‘22. 6. 2.	주영근 과장 홍종옥 팀장 임영수 주무관
○ 건축허가(증축) 신청 ※ 상수도과-12671호	‘22. 6. 3.	주영근 과장 홍종옥 팀장 임영수 주무관
○ 일반수도사업 주민 등의 의견청취 공고 ※ 상수도과-12708호	‘22. 6. 3.	주영근 과장 홍종옥 팀장 임영수 주무관
○ 지방건설기술심의위원회 심의 의뢰 ※ 상수도과-14782호	‘22. 6. 29.	주영근 과장 홍종옥 팀장 임영수 주무관
○ 사업인정 의제 의견청취 처리검토 ※ 상수도과-14992호	‘22. 7. 1.	주영근 과장 홍종옥 팀장 임영수 주무관
○ 일반수도사업인가 신청 ※ 상수도과-16093호	‘22. 7. 14.	주영근 과장 홍종옥 팀장 임영수 주무관
○ 사업인정 의제를 위한 중앙토지수용위원회 협의 요청 ※ 상수도과-16169호	‘22. 7. 14.	주영근 과장 홍종옥 팀장 임영수 주무관

○ 지적분할측량 사전접수 및 일정 협의 요청 ※ 상수도과-24061호	‘22. 10. 21.	주영근 과장 구제태 팀장 한상범 주무관
○ 건설사업관리계획 수립 제출 ※ 상수도과-27797호	‘22. 12. 7.	주영근 과장 구제태 팀장 한상범 주무관
○ 통합건설사업관리용역 일상감사 의뢰 ※ 상수도과-27813호	‘22. 12. 7.	주영근 과장 구제태 팀장 한상범 주무관
○ 통합건설사업관리용역 일상감사 결과 통보 ※ 감사담당관-10215호	‘22. 12. 12.
○ 일반수도사업인가 정정고시 요청 ※ 상수도과-2002호	‘23. 1. 25.	김정남 과장 김 혁 팀장 김종서 주무관
○ 통합건설사업관리용역 집행계획 보고 ※ 상수도과-3628호	‘23. 2. 2.	정기명 시장 김종기 부시장 김태횡 단장 김정남 과장 김 혁 팀장 김종서 주무관
○ 편입토지(지장물) 실태조사 계획 알림 ※ 상수도과-5250호	‘23. 2. 10.	김정남 과장 김 혁 팀장 오현지 주무관
○ 지적 분할측량 의뢰 ※ 상수도과-3899호	‘23. 2. 13.	김정남 과장 김 혁 팀장 김종서 주무관
○ 보상계획 열람 공고 ※ 상수도과-7003호	‘23. 3. 21.	김정남 과장 김 혁 팀장 오현지 주무관
○ 공사 계약심사 요청 ※ 상수도과-7005호	‘23. 3. 21.	김정남 과장 김 혁 팀장 김종서 주무관
○ 지적공부정리 신청 ※ 상수도과-10725호	‘23. 5. 1.	김정남 과장 김 혁 팀장 김종서 주무관
○ 공사 계약의뢰 ※ 상수도과-14783호	‘23. 6. 15.	김정남 과장 김 혁 팀장 김종서 주무관

○ 총괄 및 1차분 등 계약체결 통보 ※ 수도행정과-7005호	‘23. 7. 14.
○ 관급자재(맨홀) 계약 의뢰 ※ 상수도과-22633호	‘23. 9. 18.	김정남 과장 김승주 팀장 김종서 주무관
○ 관급자재(주철관) 수량변경 검토 ※ 상수도과-23711호	‘23. 10. 4.	김정남 과장 김승주 팀장 김종서 주무관
○ 안전관리계획서 조건부 승인 통보 ※ 상수도과-24281호	‘23. 10. 12.	김정남 과장 김승주 팀장 김종서 주무관
○ 관로공사 유용토 운반 및 사토처리계획 검토 ※ 상수도과-30349호	‘23. 12. 27.	김정남 과장 김승주 팀장 김종서 주무관
○ 1차분 공사계획 변경 시행 검토 보고 ※ 상수도과-4598호	‘24. 2. 26.	장현철 과장 김승주 팀장 김종서 주무관
○ 준공계(1차분) ※ 수도행정과-2800호	‘24. 2. 28.
○ 2차분 시행계획 ※ 상수도과-5193호	‘24. 3. 5.	정기명 시장 김종기 부시장 오정환 단장 장현철 과장 김승주 팀장 김종서 주무관
○ 품질시험계획서 변경승인 ※ 상수도과-16360호	‘24. 7. 16.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 주무관
○ 실정보고 검토(공사구간) ※ 상수도과-19154호	‘24. 8. 19.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 주무관
○ 설계변경 검토(2차분) ※ 상수도과-21106호	‘24. 9. 9.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 주무관
○ 안전관리자 변경 승인 ※ 상수도과-23079호	‘24. 10. 4.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 주무관
○ 실정보고 검토(안전관리비) ※ 상수도과-23959호	‘24. 10. 15.	김문환 단장 이광재 과장 서주용 팀장 한상범 주무관

○ 통합건설사업관리용역(3차분) 시행 ※ 상수도과-175호	‘25. 1. 2.	김문환 단장 박영춘 과장 정은성 팀장 이광재 과장 서주용 팀장 한상범 주무관
○ 통합건설사업관리용역(3차분) 계약의뢰 ※ 상수도과-210호	‘25 1. 3	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 주무관
○ 실정보고 제출건에 대한 회신 ※ 상수도과-410호	‘25. 1. 6.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 통합건설사업관리용역(3차분) 계약의뢰 ※ 상수도과-210호	‘25 1. 3	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 주무관
○ 통합건설사업관리용역(3차분) 발주내역서 제출 ※ 동성건설사업 제2024-2166호	‘25. 1. 3.
○ 통합건설사업관리용역(3차분) 계약체결 알림 ※ 수도행정과-560호	‘25. 1. 13.
○ 현장대리인 이탈 승인 통보 ※ 상수도과-1498호	‘25. 1. 16.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 통합건설사업관리 책임기술인 현장이탈 승인 통보 ※ 상수도과-1499호	‘25. 1. 16.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 실정보고에 따른 검토 보고 ※ 상수도과-2776호	‘25. 1. 31.	김문환 단장 윤국환 과장 정은성 팀장 이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 실정보고 승인사항 통보 ※ 상수도과-2873호	‘25. 2. 4.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 총괄 및 2차분 등 변경계약 의뢰 ※ 상수도과-2868호	‘25. 2. 4.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 예산변경 사용 검토 보고 ※ 상수도과-2880호	‘25. 2. 4.	김문환 단장 윤국한 과장 박영심 팀장 이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장

○ 총괄 및 2차분 외 2건 변경계약 사항 알림 ※ 수도행정과-1615호	‘25. 2. 6.
○ 전기,계측제어 계약심사 재요청 ※ 상수도과-3277호	‘25. 2. 7.	이광재 과장 서주용 팀장 김범수 주무관 한상범 차장
○ 계약심사 결과 회신 ※ 감사담당관-1616호	‘25. 2. 11.
○ 통합건설사업관리용역(3차분) 용역기간 연장 검토 보고 ※ 상수도과-4239호	‘25 2. 18.	김문환 단장 윤국한 과장 정은성 팀장 이광재 과장 최우진 팀장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 전기,계측제어 계약의뢰(긴급) ※ 상수도과-4175호	‘25. 2. 18.	이광재 과장 서주용 팀장 김범수 주무관 한상범 차장
○ 실정보고 승인사항 통보 ※ 상수도과-4260호	‘25. 2. 19.	이광재 과장 최우진 팀장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 통합건설사업관리용역(3차분) 변경계약 의뢰 ※ 상수도과-4259호	‘25. 2. 19.	최우진 팀장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 증설공사(3차분) 시행계획 ※ 상수도과-4359호	‘25. 2. 19.	김문환 단장 윤국한 과장 정은성 팀장 이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 통합건설사업관리용역(3차분) 변경계약 사항 알림 ※ 수도행정과-2309호	‘25. 2. 19.
○ 전기,계측제어 입찰 공고 ※ 수도행정과=2351호	‘25. 2. 20.
○ 증설공사(3차분) 및 폐기물처리용역(3차분) 계약 의뢰 ※ 상수도과-4790호	‘25. 2. 25.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장

○ 통합건설사업관리용역(3차분) 선금 지급 결정 알림 ※ 수도행정과-2626호	‘25. 2. 25.
○ 증설공사(3차분) 외 1건 계약체결(감독공무원 지정) 알림 ※ 수도행정과-2646호	‘25. 2. 26.
○ 증설공사(2차분) 하도급 현장대리인(변경) 적정성 검토 보고 ※ 상수도과-5105호	‘25. 2. 28.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 증설공사(2차분) 하도급 현장대리인(변경) 검토 결과 회신 ※ 상수도과-5117호	‘25 2. 28.
○ 증설공사(2차분) 하도급 현장대리인 변경 승인 알림 ※ 상수도과-2892호	‘25. 3. 4.
○ 증설공사 사토장 완료 보고에 따른 검토 보고 ※ 상수도과-5370호	‘25. 3. 4.	이광재 과장 윤국한 과장 정은성 팀장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 증설공사(2차분) 하도급(철근콘크리트공사) 현장대리인 변경 승인 알림 ※ 수도행정과-2903호	‘25. 3. 4.
○ 실정보고 승인사항 통보 ※ 상수도과-5420호	‘25. 3. 4.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 폐기물처리용역(2차분) 현장대리인(변경) 적정성 검토 보고 ※ 상수도과-5743호	‘25. 3. 7.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 폐기물처리용역(2차분) 현장대리인(변경) 검토 결과 회신 ※ 상수도과-5748호	‘25. 3. 7.
○ 폐기물처리용역(2차분) 현장대리인 변경 승인 알림 ※ 수도행정과-3152호	‘25. 3. 7.

○ 계약체결(공사관리관 지정) 알림 ※ 수도행정과-3286호	‘25. 3. 11.
○ 재해예방 기술지도 용역 시행 ※ 상수도과-6158호	‘25. 3. 12.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 폐기물처리용역(3차분) 선금 지급 결정 알림 ※ 수도행정과-3306호	‘25 3. 12.
○ 증설공사(3차분) 선금 지급 결정 알림 ※ 수도행정과-3682호	‘25 3. 19.
○ 증설공사(2차분, 3회) 기성 검사자 지정 알림 ※ 수도행정과-3840호	‘25. 3. 21.
○ 증설공사(2차분) 하도급(변경) 계약 적정성 검토 보고 ※ 상수도과-7217호	‘25. 3. 24.	이광재 과장 윤국한 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 증설공사(2차분) 하도급(변경) 계약 검토 결과 회신 ※ 상수도과-7354호	‘25. 3. 25.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 증설공사(2차분) 하도급(변경)계약 적정알림 ※ 수도행정과-4023호	‘25. 3. 26.
○ 증설공사(2차분) 기성금(3회) 지급 결정 알림 ※ 수도행정과-4069호	‘25. 3. 26.
○ 증설공사 현장대리인 이탈 승인 통보 ※ 상수도과-7598호	‘25. 3. 27.	이광재 과장 최우진 팀장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 증설공사(3차분) 관급자재(변경) 구입 검토 보고 ※ 상수도과-8124호	‘25. 4. 2.	김문환 단장 윤국한 과장 정은성 팀장 이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 통합건설사업관리 분야기술인 현장이탈 승인 통보 ※ 상수도과-8121호	‘25. 4. 2.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장

○ 증설공사(3차분)-관급자재(아스콘) 계약체결 및 공사관리관 지정 통보 ※ 수도행정과-4403호	‘25. 4. 2.
○ 증설공사 품질관리자 변경 적정성 검토 보고 ※ 상수도과-8120호	‘25. 4. 2.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 증설공사(2차분) 하도급 현장대리인(변경) 적정성 검토 보고 ※ 상수도과-8119호	‘25 4. 2.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 증설공사(2차분) 하도급 현장대리인(변경) 검토 결과 회신 ※ 상수도과-8174호	‘25 4. 2.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 품질관리자 변경 검토 회신 ※ 상수도과-8154호	‘25. 4. 2.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 증설공사(3차분) 관급자재 변경계약 의뢰 ※ 상수도과-8153호	‘25. 4. 2.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 품질관리자 변경 승인 알림 ※ 수도행정과-4477호	‘25. 4. 3.
○ 설공사(2차분) 하도급 현장대리인 변경 승인 알림 ※ 수도행정과-4478호	‘25. 4. 3.
○ 품질관리자 변경 승인 알림(추가) ※ 수도행정과-4480호	‘25. 4. 3.
○ 증설공사(3차분) 하도급(변경) 계약 적정성 검토 보고 ※ 상수도과-8494호	‘25. 4. 7.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 증설공사(3차분) 하도급 계약 검토 결과 회신 ※ 상수도과-8502호	‘25. 4. 7.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 증설공사(3차분)-관급자재 계약체결 알림 ※ 수도행정과-4608호	‘25. 4. 7.
○ 증설공사(3차분) 하도급 계약 적정알림 ※ 수도행정과-4636호	‘25. 4. 7.

○ 증설공사 관급자재 구매 관련 업무 협의 ※ 상수도과-9135호	‘25. 4. 14.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 증설공사 관급자재 구매 관련 업무 협의 ※ 상수도과-9265호	‘25. 4. 15.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 품질시험계획서(3차분) 승인요청에 따른 검토 보고 ※ 상수도과-9550호	‘25 4. 18.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 증설공사 실정보고에 따른 검토 보고 ※ 상수도과-9633호	‘25 4. 18.	이광재 과장 윤국한 과장 정은성 팀장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 증설공사 품질시험계획서(3차분) 승인 ※ 상수도과-9673호	‘25. 4. 19.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 실정보고 승인사항 통보 ※ 상수도과-9672호	‘25. 4. 19.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 사업비 조정 검토 자료 제출 요청 ※ 상수도과-9671호	‘25. 4. 20.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 증설공사 관급자재 구매 관련 업무 협의 회신 ※ 감사담당관-4084호	‘25. 4. 21.
○ 증설공사 관급자재 구매 관련 업무 협의 회신 ※ 수도행정과-5720호	‘25. 4. 28.
○ 설계변경 검토 보고 ※ 상수도과-11331호	‘25. 5. 8.	김문환 단장 윤국한 과장 정은성 팀장 이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 증설공사 실정보고에 따른 검토 보고 ※ 상수도과-11344호	‘25. 5. 9.	이광재 과장 윤국한 과장 정은성 팀장 서주용 팀장 한상범 차장

○ 실정보고 승인사항 통보 ※ 상수도과-11486호	‘25. 5. 10.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 변경계약 사항 알림 ※ 수도행정과-6170호	‘25. 5. 12.
○ 통합건설사업관리용역(총괄분, 3차분) 변경계약 의뢰 ※ 상수도과-11581호	‘25 5. 12.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 통합건설사업관리용역(총괄 및 3차분) 변경계약 사항 알림 ※ 수도행정과-6276호	‘25 5. 13.
○ 도시개발사업 개발계획 및 실시계획 변경 인가 고시 알림 ※ 공영개발과-3641호	‘25. 5. 14.
○ 증설공사 현장대리인 이탈 승인 통보 ※ 상수도과-11939호	‘25. 5. 15.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 도시개발구역지정 및 개발계획(6차변경), 실시계획(5차변경) 승인요청 관련 협의 ※ 공영개발과-3970호	‘25. 5. 29.
○ 통합건설사업관리 분야기술인 현장이탈 승인 통보 ※ 상수도과-14318호	‘25. 6. 12.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 실정보고에 따른 검토 보고 ※ 상수도과-14844호	‘25. 6. 17.	김문환 단장 윤국한 과장 정은성 팀장 이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 실정보고 승인사항 통보 ※ 상수도과-14890호	‘25. 6. 18.	이광재 과장 최상록 팀장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 증설공사(총괄분) 등 변경계약 의뢰 ※ 상수도과-14893호	‘25. 6. 18.	최상록 팀장 서주용 팀장 한상범 차장

○ 실정보고에 따른 검토 보고 ※ 상수도과-15052호	‘25. 6. 19.	이광재 과장 윤국한 과장 정은성 팀장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 실정보고 승인사항 통보 ※ 상수도과-15081호	‘25. 6. 20.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 변경계약 사항 알림 ※ 수도행정과-7876호	‘25 6. 20.
○ 설계변경 검토 보고 ※ 상수도과-15317호	‘25 6. 23.	김문환 단장 윤국한 과장 정은성 팀장 이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 변경계약 사항 알림 ※ 수도행정과-7906호	‘25. 6. 23.
○ 변경계약 의뢰 ※ 상수도과-15343호	‘25. 6. 24.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 변경계약 사항 알림 ※ 수도행정과-7981호	‘25. 6. 24.
○ 기성(1회) 검사공무원 지정 알림 ※ 수도행정과-8061호	‘25. 6. 25.
○ 기성 검사자 알림 ※ 수도행정과-8060호	‘25. 6. 25.
○ 기성금(1회) 지급 결정 알림 ※ 수도행정과-8115호	‘25. 6. 26.
○ 기성금(4회) 지급 결정 알림 ※ 수도행정과-8114호	‘25. 6. 26.
○ 안전관리자 변경 검토요청 ※ 수도행정과-8111호	‘25. 6. 26.
○ 증설공사 추진에 따른 주·정차 단속 면제 협조 요청 ※ 상수도과-15596호	‘25. 6. 26.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장

○ 안전관리자 변경 적정성 검토 보고 ※ 상수도과-15678호	‘25. 6. 27.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 실정보고에 따른 검토 보고 ※ 상수도과-15734호	‘25. 6. 27.	김문환 단장 윤국한 과장 정은성 팀장 이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 안전관리자 변경 검토 결과 회신 ※ 상수도과-15688호	‘25 6. 27.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 안전관리자 변경 승인 알림 ※ 수도행정과-8191호	‘25 6. 30.
○ 증설공사(전기, 계측제어) 1차분 변경계약 의뢰 ※ 상수도과-15901호	‘25. 6. 30.	최우진 팀장 서주용 팀장 김범수 주무관 한상범 차장
○ 변경계약 사항 알림 ※ 수도행정과-8304호	‘25. 7. 1.
○ 전기사용신청서 및 사용전점검신청서 제출 ※ 상수도과-16047호	‘25. 7. 1.	최우진 팀장 서주용 팀장 김범수 주무관 한상범 차장
○ 증설공사(2차분) 관급자재 변경계약(정정) 의뢰 ※ 상수도과-16091호	‘25. 7. 1.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 예산확보를 위한 지방채 발행 계획 보고 ※ 상수도과-16092호	‘25. 7. 1.
○ 통합건설사업관리 책임기술인 현장이탈 승인 통보 ※ 상수도과-16269호	‘25. 7. 3.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 하도급(변경) 계약 적정성 검토 보고 ※ 상수도과-16284호	‘25. 7. 3.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장
○ 하도급 계약 검토 결과 회신 ※ 상수도과-16289호	‘25. 7. 3.	이광재 과장 서주용 팀장 한상범 차장

○ 하도급 (변경)계약 적정알림 ※ 수도행정과-8551호	‘25. 7. 4.
○ 안전관리계획서 재검토 ※ 건설안전관리실-10946호	‘25. 7. 7.
○ 안전관리계획서(재검토 5차) 승인 통보 ※ 상수도과-16700호	‘25 7. 8.	이광재 과장 김수구 팀장 한상범 차장
○ 전기시설 부담금 집행 ※ 상수도과-16970호	‘25 7. 10.	이광재 과장 김수구 팀장 한상범 차장
○ 기술지원기술인 변경 검토요청 ※ 수도행정과-9083호	‘25. 7. 16.
○ 기술지원건설사업관리기술인(상하수도) 변경 요청에 대한 검토 보고 ※ 상수도과-17436호	‘25. 7. 16.	이광재 과장 김수구 팀장 한상범 차장
○ 기술지원건설사업기술인 변경 검토 결과 회신 ※ 상수도과-17472호	‘25. 7. 16.	이광재 과장 김수구 팀장 한상범 차장
○ 기술지원기술인 변경 검토요청 ※ 수도행정과-9172호	‘25. 7. 17.
○ 기술인 변경 승인 알림 ※ 수도행정과-9171호	‘25. 7. 17.
○ 통합건설사업관리 분야기술인 현장이탈 승인 통보 ※ 상수도과-17874호	‘25. 7. 21.	이광재 과장 김수구 팀장 한상범 차장
○ 출장결과보고서(죽림배수지) ※ 상수도과-17993호	‘25. 7. 22.	이광재 과장 김수구 팀장 한상범 차장
○ 출장결과보고서(죽림배수지) ※ 상수도과-18277호	‘25. 7. 24.	이광재 과장 김수구 팀장 한상범 차장
○ 관급자재 등 변경계약 의뢰 ※ 상수도과-18468호	‘25. 7. 28.	이광재 과장 김수구 팀장 한상범 차장

○ 품질시험계획서(2회 변경) 승인요청에 따른 검토 보고 ※ 상수도과-18536호	‘25. 7. 29.	이광재 과장 김수구 팀장 한상범 차장
○ 품질시험계획서(2회 변경) 승인 ※ 상수도과-18695호	‘25. 7. 29.	이광재 과장 김수구 팀장 한상범 차장
○ 하도급(변경) 계약 적정성 검토 보고 ※ 상수도과-18707호	‘25 7. 30.	이광재 과장 김수구 팀장 한상범 차장
○ 하도급(변경) 계약 검토 결과 회신 ※ 상수도과-18749호	‘25 7. 30.	이광재 과장 김수구 팀장 한상범 차장
○ 관급자재 변경 구매 등 시행 ※ 상수도과-18750호	‘25. 7. 30.	이광재 과장 윤국한 과장 정은성 팀장 김수구 팀장 한상범 차장
○ 하도급 (변경)계약 적정알림 ※ 수도행정과-9824호	‘25. 7. 31.
○ 안전관리자 변경 적정성 검토 보고 ※ 상수도과-19541호	‘25. 8. 7.	이광재 과장 김수구 팀장 한상범 차장
○ 기술지원건설사업관리기술인(토목시공) 변경 요청에 대한 검토 보고 ※ 상수도과-20330호	‘25. 8. 18.	이광재 과장 김수구 팀장 한상범 차장
○ 실정보고에 따른 검토 보고 ※ 상수도과-22638호	‘25. 9. 10.	이광재 과장 윤국한 과장 정은성 팀장 김수구 팀장 한상범 차장
○ 실정보고 승인사항 통보 ※ 상수도과-23417호	‘25. 9. 19.	이광재 과장 김수구 팀장 한상범 차장
○ 실정보고에 따른 검토 보고 ※ 상수도과-24879호	‘25. 10. 2.	김문환 단장 윤국한 과장 정은성 팀장 이광재 과장 김수구 팀장 한상범 차장