정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	수정동 동백공영 주차장 뒤 암반사면 정비
② 추진배경	수정동 동백공영 주차장 사면 붕괴에 따른 보수보강 공사
③ 사업개요	암반사면 보강 L=20m, H=15m, 동백공영주차장 철거 1식
④ 사업부서	여수시 공원과		⑤ 담당자		녹지5급 박민수 행정6급 김은희 시설6급 정준호
⑥ 선정기준	10억원 이상의 사업		⑦ 사업기간		’24. 4. ~ ’24. 11.
<그간 주요 추진내용>
○ 수정동 동백공영주차장 뒤 암반사면 보수공사 시행 ※ 공원과 - 2648호		‘24. 2. 15.		시 장 정기명 부시장 김종기 국 장 김태횡 과 장 박민수 팀 장 김은희 주무관 정동섭
○ 수정동 동백공영주차장 뒤 암반사면 보수공사 폐기물처리용역 시행 ※ 공원과 - 2520호		‘24. 2. 15.		부시장 김종기 국 장 김태횡 과 장 박민수 팀 장 김은희 주무관 정동섭
○ 수정동 동백공영주차장 뒤 암반사면 보수공사 건설사업관리용역(감독권한대행) 시행 ※ 공원과 - 2474호		‘24. 2. 15.		국 장 김태횡 과 장 박민수 팀 장 김은희 주무관 정동섭
○ 수정동 동백공영주차장 해체공사 감리용역 계약의뢰		‘24. 5. 10.		과 장 박민수 팀 장 김은희 주무관 정동섭
○ 수정동 동백공영주차장 뒤 암반사면 보수공사 실정보고에 대한 검토보고 ※ 공원과 - 7473호		‘24. 5. 10.		과 장 박민수 팀 장 김은희 주무관 정동섭
○ 수정동 동백공영주차장 뒤 암반사면 보수공사 건설사업관리용역(감독권한대행) 일시정지 해지 및 설계변경 검토보고 ※ 공원과 - 9990호		‘24. 6. 19.		국 장 김태횡 과 장 박민수 팀 장 김은희 주무관 정동섭
○ 수정동 동백공영주차장 해체공사 감리용역 준공검사조서 제출 ※ 공원과 - 10737호		‘24. 6. 28.		과 장 박민수 팀 장 김은희 주무관 정동섭
○ 수정동 동백주차장 뒤 암반사면 보수공사 등 3건 실정사항(2차)에 따른 설계변경 검토보고 ※ 공원과 - 12213호		‘24. 7. 17.		부시장 최정기 국 장 김태횡 과 장 박민수 팀 장 김은희 주무관 정준호
○ 수정동 동백주차장 뒤 암반사면 보수공사 등 3건 계약기간 연장요청 ※ 공원과 - 12222호		‘24. 7. 22.		과 장 박민수 팀 장 김은희 주무관 정준호
○ 수정동 동백주차장 뒤 암반사면 보수공사 변경계약 체결 알림 ※ 회계과 - 39902호		‘24. 7. 22.		국 장 김병완 과 장 강행숙 팀 장 양동안 주무관 이정란
○ 수정동 동백주차장 뒤 암반사면 보수공사 현장 실정사항 승인 통보 ※ 공원과 - 12434호		‘24. 7. 24.		과 장 박민수 팀 장 김은희 주무관 정준호
○ 「수정동 동백주차장 뒤 암반사면 보수공사」 등 2건 실정사항에 따른 공사일시정지 검토보고 ※ 공원과 - 17123호		‘24.10.14.		국 장 김태횡 과 장 강행숙 팀 장 양동안 과 장 박민수 팀 장 김은희 주무관 정준호
○ 「수정동 동백주차장 뒤 암반사면 보수공사」 일시정지 알림 ※ 회계과 - 53798호		‘24.10.15.		국 장 김태횡 과 장 강행숙 팀 장 양동안 주무관 이정란