정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	여수시 산단지역 등 고효율 조명등 교체
② 추진배경	산단지역 저효율 조명등을 고효율 조명등으로 교체하여 에너지 절약 및 지구온난화 예방과 탄소 중립 실천을 통한 기후변화 대응 선도 도시 기반 조성을 위함.
③ 사업개요	대 상: 여수국가산단, 율촌제1산단 내 가로등 및 터널등 - 내 용: 저효율 조명등 → 고효율 조명등(LED)등 교체 (여수산단 1,676등, 율촌1산단 706등, 한구미터널 892등) - 사업비: 1,580,106천원(균특30% 474,032, 시비30% 474,032, 민간40% 632,042)
④ 사업부서	도시계획과		⑤ 담당자	공업7급 신승민
⑥ 선정기준	10억 원 이상 사업		⑦ 사업기간	2024. 10. ~ 2025. 3.
<그간 주요 추진내용>
○ 1차 지역에너지 절약사업 신청 ※ 도시계획과-7643호(’23.03.30.)		‘23. 3. 30.	이영호 도시계획과장 홍주빈 조명관리팀장 서정문 차장
○ 지역에너지 절약 보조사업 확정 통보 ※ 산업부 에너지정책과-789호 (’24.01.09.)		‘24. 1. 9.	강창구 에너지정책과장 조영진 에너지정책팀장 홍석기 주무관
○ 산단지역 고효율 조명등 교체사업 설계용역 시행 ※ 도시계획과-2741호(’24.02.01.)		‘24. 2. 1.	염승열 건설교통국장 이영호 도시계획과장 강행숙 회계과장 김진욱 계약1팀장 홍주빈 조면관리팀장 박종석 주무관
○ 「여수시 산단지역 고효율 조명등 교체공사」입찰공고 ※ 회계과-31757호(’24.06.17.)		‘24. 6. 17.	김병완 행정안전국장 고영백 청사관리팀장 김진욱 계약1팀장 김대건 주무관
○ 「여수시 산단지역 고효율 조명등 교체공사」관급자재 선정심의 요청 반려 ※ 회계과-34152호(’24.06.25.)		‘24. 6. 25.	강행숙 회계과장 김진욱 계약1팀장 김수현 주무관
○ 「여수시 산단지역 고효율 조명등 교체공사」ESCO용역사업 사전공고 이의제기에 대한 답변 ※ 도시계획과-16622호(’24.07.03.)		‘24. 7. 3.	이영호 도시계획과장 홍주빈 조명관리팀장 박종석 주무관

○ 「여수시 산단지역 고효율 조명등 교체 ESCO사업」일상감사 및 계약심사 요청 ※ 도시계획과-4200호(’24.08.27.)	‘24. 8. 27.	이영호 도시계획과장 서상원 조명관리팀장 박종석 주무관
○ 「여수시 산단지역 고효율 조명등 교체 ESCO사업」시행(변경) ※ 도시계획과-4471호(’24.08.29.)	‘24. 8. 29.	정기명 시장 최정기 부시장 염승열 도시건설국장 이영호 도시계획과장 강행숙 회계과장 정일권 계약1팀장 서상원 조명관리팀장 박종석 주무관
○ 「여수시 산단지역 고효율 조명등 교체 ESCO사업」일상감사 및 계약심사 결과 회신 ※ 감사담당관-9355호(’24.09.02.)	‘24. 9. 2.	정웅정 감사담당관 이재태 기술감사팀장 송수진 주무관
○ 「여수시 산단지역 고효율 조명등 교체 ESCO사업」계약체결 요청 ※ 도시계획과-4704호(’24.09.02.)	‘24. 9. 2.	이영호 도시계획과장 서상원 조명관리팀장 박종석 주무관
○ 「여수시 산단지역 고효율 조명등 교체 ESCO사업」사전규격공개 이의 제기에 대한 답변 ※ 도시계획과-5470호(’24.09.10.)	‘24. 9. 10.	이영호 도시계획과장 서상원 조명관리팀장 박종석 주무관
○ 「여수시 산단지역 고효율 조명등 교체 ESCO사업」입찰공고 ※ 회계과-48839호(’24.09.12.)	‘24. 9. 12.	김병완 행정안전국장 강행숙 회계과장 정일권 계약1팀장 김대건 주무관
○ 「여수시 산단지역 고효율 조명등 교체 ESCO사업」입찰 공고(수정) ※ 회계과-49574호(’24.09.20.)	‘24. 9. 20.	김병완 행정안전국장 강행숙 회계과장 정일권 계약1팀장 김대건 주무관
○ 「여수시 산단지역 고효율 조명등 교체 ESCO사업」낙찰자 결정 알림 ※ 회계과-52282호(’24.10.07.)	‘24. 10. 7.	김병완 행정안전국장 강행숙 회계과장 정일권 계약1팀장 김대건 주무관

○ 「여수시 산단지역 고효율 조명등 교체 ESCO사업」계약체결 및 감독공무원 지정 알림(정정) ※ 회계과-54612호(’24.10.22.)	‘24. 10. 22.	한진숙 총무과장(대결) 강행숙 회계과장 정일권 계약1팀장 김대건 주무관
○ 여수시 산단지역 고효율 조명등 교체 ESCO사업 착공계 제출 ※ 도시계획과-8687호(’24.10.23.)	‘24. 10. 23.	도시경관팀장 김수구 박종석 주무관
○ 여수시 산단지역 고효율 조명등 교체 ESCO사업 자재승인(가로등기구) 검토보고 ※ 도시계획과-9789호(’24.11.06.)	‘24. 11. 6.	이영호 도시계획과장 서상원 조명관리팀장 박종석 주무관
○ 여수시 산단지역 고효율 조명등 교체 ESCO사업 계약심사 요청(설계변경) ※ 도시계획과-13379호(’24.12.11.)	‘24. 12. 11.	이영호 도시계획과장 서상원 조명관리팀장 박종석 주무관
○「(설계변경)여수시 산단지역 고효율 조명등 교체 ESCO사업」계약심사 결과 회신 ※ 감사담당관-13163호(’24.12.12.)	‘24. 12. 12.	정웅정 감사담당관 이재태 기술감사팀장 송수진 주무관
○ 여수시 산단지역 고효율 조명등 교체 ESCO사업 설계변경 및 사고이월 계획 ※ 도시계획과-14189호(’24.12.18.)	‘24. 12. 18.	정기명 시장 최정기 부시장 염승열 도시건설국장 이영호 도시계획과장 신영자 기획예산과장 서은주 예산팀장 강행숙 회계과장 정일권 계약1팀장 서상원 조명관리팀장 박종석 주무관
○ 여수시 산단지역 고효율 조명등 교체 ESCO사업 변경계약 체결요청 ※ 도시계획과-14215호(’24.12.18.)	‘24. 12. 18.	이영호 도시계획과장 서상원 조명관리팀장 박종석 주무관

○ 「여수시 산단지역 고효율 조명등교체 ESCO사업」 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-68652호(’24.12.24.)	‘24. 12. 24.	김병완 행정안전국장 강행숙 회계과장 정일권 계약1팀장 김대건 주무관
○ 「여수시 산단지역 고효율 조명등교체 ESCO 사업」 감독공무원 변경 알림 ※ 회계과-2146호(’25.01.14.)	‘25. 1. 14.	김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 이정란 주무관
○ 「여수시 산단지역 고효율 조명등교체 ESCO 사업」적기 추진 알림 ※ 도시계획과-1096호(’25.01.15.)	‘25. 1. 15.	명호남 도시계획과장 서상원 조명관리팀장 신승민 주무관
○「여수시 산단지역 고효율 조명등 교체 ESCO사업」 일시중지 검토보고 ※ 도시계획과-2312호(’25.02.04.)	‘25. 2. 4.	이영호 도시건설국장 명호남 도시계획과장 김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 서상원 조명관리팀장 신승민 주무관
○「여수시 산단지역 고효율 조명등교체 ESCO 사업」 일시정지 알림 ※ 회계과-5443호(’25.02.05.)	‘25. 2. 5.	나병곤 행정안전국장 김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 이정란 주무관
○ 여수시 산단지역 고효율 조명등 교체 ESCO사업 자재승인(터널등기구) 검토보고 ※ 도시계획과-2535호(’25.02.06.)	‘25. 2. 6.	명호남 도시계획과장 서상원 조명관리팀장 신승민 주무관
○ 여수시 산단지역 고효율 조명등 교체 ESCO사업 자재(터널등기구) 제작승인 ※ 도시계획과-2536호(’25.02.06.)	‘25. 2. 6.	명호남 도시계획과장 서상원 조명관리팀장 신승민 주무관

○ 「여수시 산단지역 고효율 조명등 교체 ESCO사업」 일시정지 해지 검토보고 ※ 도시계획과-4296호(’25.03.05.)	‘25. 3. 5.	명호남 도시계획과장 서상원 조명관리팀장 신승민 주무관
○ 「여수시 산단지역 고효율 조명등 교체 ESCO 사업」 일시중지 해지 요청 ※ 도시계획과-4368호(’25.03.05.)	‘25. 3. 5.	명호남 도시계획과장 서상원 조명관리팀장 신승민 주무관
○ 「여수시 산단지역 고효율 조명등교체 ESCO 사업」 일시정지 해지 및 변경계약 체결 알림 ※ 회계과-10583호(’25.03.07.)	‘25. 3. 7.	박희우 총무과장(대결) 김종필 회계과장 정일권 계약1팀장 이정란 주무관
○ 계약전력 변경요청(여수시 산단지역 고효율 조명등교체 ESCO 사업) ※ 도시계획과-5554호(’25.03.20.)	‘25. 3. 20.	명호남 도시계획과장 서상원 조명관리팀장 신승민 주무관
○ 「여수시 산단지역 고효율 조명등교체 ESCO 사업」 준공계 제출 ※ 도시계획과-5580호(’25.03.21.)	‘25. 3. 21.	명호남 도시계획과장 서상원 조명관리팀장 신승민 주무관
○ 『여수시 산단지역 고효율 조명등교체 ESCO 사업』 준공검사조서 제출 ※ 도시계획과-6087호(’25.03.27.)	‘25. 3. 27.	명호남 도시계획과장 서상원 조명관리팀장 신승민 주무관