정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	동문동 우리은행 뒤 도시계획도로 개설
② 추진배경	장기미집행 도시계획도로 개설로 오랜 주민숙원 해결 및 화재 등 재난상황대비
③ 사업개요	○ 위 치 : 관문동 381번지 일원 ○ 사 업 량 : L=196m, B=6~8m ○ 사 업 비 : 3,860백만원(설계 60, 공사 550 보상 3,250)
④ 사업부서	여수시 도로과		⑤ 담당자		시설7급 조민철 시설5급 명호남
⑥ 선정기준	10억 원 이상의 공사		⑦ 사업기간		‵19. 8. ~ ‵26. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계용역 시행 계획 ※ 도로과-9606호		‵19. 8. 5.		김기채 국장 서유권 과장 박은규 과장 오병구 팀장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 실시설계용역 계약심사 의뢰 ※ 도로과-9641호		‵19. 8. 5.		서유권 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 실시설계용역 계약심사 결과 알림 ※ 회계과-40116호		‵19. 8. 6.		박동훈 주무관
○ 실시설계용역 계약의뢰 ※ 도로과-9749호		‵19. 8. 6.		서유권 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 실시설계용역 착수계 ※ 도로과-10787호		‵19. 9. 1.		박동훈 주무관
○ 도시계획선 명시 및 지적 경계복원측량 의뢰 ※ 도로과-13469호		‵19. 10. 31.		서유권 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 실시설계용역 일시 정지 검토보고 ※ 도로과-15831호		‵19. 12. 23.		김기채 국장 결재 장세길 과장 대결 서유권 과장 박은규 과장 오병구 팀장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 실시설계용역 일시정지 요청 ※ 도로과-15848호		‵19. 12. 23.		서유권 과장 이재태 팀장 박동훈 주무관
○ 실시설계용역 일시정지 통보(정정) ※ 도로과-68261호		‵20. 1. 5.		박동훈 주무관
○ 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가 신청 ※ 도로과-746호		‵20. 1. 16.		서유권 과장 이재태 팀장 정준호 주무관 박동훈 주무관
○ 사업인정 의제 관련 의견청취 이행결과 제출 요청 ※ 도시계획과-8522호		‵20. 4. 13.		문지환 주무관
○ 도시계획시설(도로) 실시계획인가 신청에 따른 보완 요청 ※ 도시계획과-9195호		‵20. 4. 21.		정준호 주무관
○ 도시계획시설(도로) 실시계획인가 신청에 따른 보완자료 제출 ※ 도시계획과-5613호		‵20. 4. 24.		서유권 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 사업인정에 대한 의견청취 결과보고 ※ 도로과-6200호		‵20. 5. 8.		서유권 과장 이재태 팀장 이덕연 팀장 정준호 주무관 문지환 주무관
○ 관계기관(부서) 협의 의견에 대한 조치계획 제출 요청 ※ 도시계획과-13647호		‵20. 6. 11.		정준호 주무관
○ 관계기관 협의 의견에 대한 조치계획 제출 ※ 도로과-7839호		‵20. 6. 15.		서유권 과장 이재태 팀장 정준호 주무관
○ 여수 도시계획시설(도로)사업 실시계획인가 알림 ※ 도시계획과-14560호		‵20. 6. 22.		정준호 주무관
○ 실시설계용역 일시정지 해지 검토보고 ※ 도로과-9811호		‵20. 7. 23.		장세길 국장 강균 과장 조계윤 과장 손하진 팀장 이재태 팀장 임선진 주무관
○ 실시설계용역 일시정지 해지 요청 ※ 도로과-9828호		‵20. 7. 23.		강균 과장 이재태 팀장 임선진 주무관
○ 실시설계용역 일시정지 해지 및 변경계약사항 통보 ※ 회계과-44027호		‵20. 7. 30.		임선진 주무관
○ 실시설계용역 완료계 ※ 도로과-10079호		‵20. 7. 29.		임선진 주무관
○ 사업추진에 따른 국가지정문화재 보존 관련 허가신청서 제출 ※ 도로과-13639호		‵21. 11. 22.		김정아 팀장 대결 전명수 팀장 류태원 주무관
○ 사업추진에 따른 국가지정문화재 보존 관련 허가신청서 제출(수정) ※ 도로과-536호		‵22. 1. 14.		오정환 과장 전명수 팀장 류태원 주무관
○ 여수 진남관 주변 도시계획시설(도로) 개설공사 조건부허가 알림 ※ 문화예술과-3154호		‵22. 2. 9.		조진우 주무관
○ 지적 분할측량 의뢰 ※ 도로과-7984호		‵22. 7. 18.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 토지이동(분할) 신청 ※ 도로과-10440호		‵22. 9. 19.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 지적 분할측량 의뢰 ※ 도로과-7984호		‵22. 7. 18.		오정환 과장 전명수 팀장 조진우 주무관
○ 편입토지(지장물)등에 대한 실태조사 계획 알림(1일차) ※ 도로과-11858호		‵22. 10. 24.		오정환 과장 김정아 팀장 김용찬 주무관
○ 편입토지(지장물)등에 대한 실태조사 계획 알림(2일차) ※ 도로과-11857호		‵22. 10. 24.		오정환 과장 김정아 팀장 김용찬 주무관
○ 편입토지(지장물)등에 대한 실태조사 계획 알림(3일차) ※ 도로과-11856호		‵22. 10. 24.		오정환 과장 김정아 팀장 김용찬 주무관
○ 지장물 실태조사 결과보고 ※ 도로과-14085호		‵22. 12. 13.		오정환 과장 김정아 팀장 김용찬 주무관
○ 보상계획 열람공고 ※ 도로과-14124호		‵22. 12. 14.		오정환 과장 김용찬 주무관
○ 보상계획 열람공고 게시 의뢰 ※ 도로과-14125호		‵22. 12. 14.		오정환 과장 김용찬 주무관
○ 보상계획 열람공고 알림 ※ 도로과-14127호		‵22. 12. 14.		오정환 과장 김용찬 주무관
○ 감정평가업자 추천 요청 ※ 도로과-1130호		‵23. 2. 1.		오정환 과장 김정아 팀장 민원기 주무관
○ 감정평가기관 추천 의뢰에 대한 회신 ※ 도로과-1405호		‵23. 2. 8.		민원기 주무관
○ 편입 토지(지장물 등)에 대한 감정평가 의뢰 ※ 도로과-1486호		‵23. 2. 10.		오정환 과장 김정아 팀장 민원기 주무관
○ 편입토지(지장물) 등에 대한 감정평가 계획 알림 ※ 도로과-1690호		‵23. 2. 16.		오정환 과장 김정아 팀장 민원기 주무관
○ 편입토지(지장물) 등에 대한 안내사항 알림 ※ 도로과-2508호		‵23. 3. 9.		오정환 과장 김정아 팀장 민원기 주무관
○ 편입 토지 등 손실보상비 산정 및 집행 계획 ※ 도로과-4574호		‵23. 4. 21.		정기명 시장 김종기 부시장 이경종 국장 오정환 과장 한진숙 과장 최철웅 팀장 박상진 팀장 김정아 팀장 최영민 주무관 민원기 주무관
○ 편입토지(지장물)에 대한 보상협의 요청(1차) ※ 도로과-4659호		‵23. 4. 27.		오정환 과장 김정아 팀장 민원기 주무관
○ 편입 토지 등에 대한 손실보상비 집행 계획 ※ 도로과-5059호		‵23. 5. 9.		오정환 과장 한진숙 과장 김진욱 팀장 김정아 팀장 민원기 주무관
○ 편입토지(지장물)에 대한 보상협의 요청(2차) ※ 도로과-6530호		‵23. 6. 13.		오정환 과장 김정아 팀장 민원기 주무관
○ 현황측량 의뢰 ※ 도로과-6652호		‵23. 6. 20.		오정환 과장 김정아 팀장 민원기 주무관
○ 편입 토지 등에 대한 보상 협의 보류 안내 ※ 도로과-9412호		‵23. 8. 22.		심근하 과장 박상진 팀장 김정아 팀장 최영민 주무관 민원기 주무관
○ 토지대장 발급 요청 ※ 도로과-12410호		‵23. 11. 7.		심근하 과장 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 토지대장 발급 요청 ※ 도로과-12410호		‵23. 11. 7.		심근하 과장 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 도시계획시설(도로) 실시계획(변경)인가 신청 ※ 도로과-12441호		‵23. 11. 7.		심근하 과장 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 사업인정 의제 관련 의견 청취 이행결과 제출 요청 ※ 도로과-26508호		‵23. 11. 14.		최영민 주무관
○ 여수 도시계획시설사업 사업인정에 관한 주민 등의 의견 청취 공고 ※ 도로과-13192호		‵23. 11. 22.		심근하 과장 결재 김정아 팀장 대결 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 여수 도시계획시설사업 사업인정에 관한 주민 등의 의견 청취 공고 알림 ※ 도로과-13245호		‵23. 11. 23.		심근하 과장 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 사업인정에 대한 의견청취 결과보고 ※ 도로과-13981호		‵23. 12. 11.		심근하 과장 결재 김정아 팀장 대결 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 사업인정 의제 관련 의견 청취 이행결과 제출 ※ 도로과-14022호		‵23. 12. 12.		김정아 팀장 대결 박상진 팀장 최영민 주무관
○ 여수 도시계획시설(도로)사업 실시계획(변경)인가 알림 ※ 도시계획과-29695호		‵23. 12. 14.		최영민 주무관
○ 감정평가업자 추천 요청 ※ 도로과-5175호		‵24. 4. 29.		명호남 과장 차용석 팀장 민원기 주무관
○ 감정평가기관 추천 의뢰에 대한 회신 ※ 도로과-5439호		‵24. 5. 7.		민원기 주무관
○ 편입 지장물에 관련 보고 ※ 도로과-5631호		‵24. 5. 9.		명호남 과장 정진희 팀장 민원기 주무관
○ 편입토지 등에 대한 감정평가 의뢰(재감정) ※ 도로과-5652호		‵24. 5. 9.		명호남 과장 정진희 팀장 민원기 주무관
○ 재감정평가 계획 알림 ※ 도로과-5674호		‵24. 5. 9.		명호남 과장 정진희 팀장 민원기 주무관
○ 재감정평가 후 보상협의 요청(1차) ※ 도로과-7074호		‵24. 6. 11.		명호남 과장 정진희 팀장 민원기 주무관
○ 제증명 공용 발급 의뢰 ※ 도로과-1222호		‵24. 8. 5.		명호남 과장 정진희 팀장 민원기 주무관
○ 편입 지장물에 관련 보고 ※ 도로과-3742호		‵24. 10. 14.		명호남 과장 정진희 팀장 민원기 주무관
○ 편입 토지(지장물)에 대한 보상협의 요청(3차) ※ 도로과-1093호		‵25. 2. 4.		박성식 과장 정진희 팀장 민원기 주무관
○ 보상협의 공시송달 공고의뢰 ※ 도로과-1487호		‵25. 2. 13.		박성식 과장 정진희 팀장 민원기 주무관
○ 편입토지(국유지)에 대한 감정평가 의뢰(추가) ※ 도로과-1488호		‵25. 2. 13.		박성식 과장 정진희 팀장 민원기 주무관
○ 편입 국유지 용도폐지 요청 ※ 도로과-1489호		‵25. 2. 13.		박성식 과장 정진희 팀장 민원기 주무관
○ 편입 건물에 대한 민원인 직접 철거 요청 검토 보고 ※ 도로과-4576호		‵25. 4. 29.		박성식 과장 정진희 팀장 민원기 주무관