【 붙임5 】

여수시 본청사 별관 증축 건립사업

- 단계 : 기본계획 -

회계과, 최두용, 061-659-3221

일반 현황	소 재 지	여수시 학동 100번지 일원
	인구 수
	공무원 수	1,932명/1,936명	현원/정원
	재정자립도	23.78%

사업 개요	기존청사
	용도	준공연도				부지면적			기준면적			건물연면적		층수 (지하/지상)				비고
	합계	1980. 1. 1.				19,242.9㎡						9,007㎡		지하1층/지상4층
	업무시설	1980. 1. 1.				19,242.9㎡						9,007㎡		지하1층/지상4층
	청사신축 필요성			별관 증축을 통한 시민들에게 양질의 민원 서비스 제공 및 업무효율 증대
	사업기간			2023. 3. ~ 2028. 12.
	사업수행방식			설계･시공 분리 : 입찰
	추정(예정)가격			62,246백만원				계약금액							낙찰율
	청사신축 계획(안)
	용도		준공연도		부지면적		기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)			비고
	합계		2028.12.		47,394㎡					17,544㎡			지하2층/지상6층
	업무시설		2028.12.		47,394㎡					17,544㎡			지하2층/지상6층

소요 예산액	사업비 조달 현황(백만원)
	구분	합계		국비	시도비		시군구비	지방채
	합계	62,246					62,246
	당해연도(H)	5,700					5,700
	H+1(2026)	26,415					26,415
	H+2(2027)	30,131					30,131
	H+3 이후
	총사업비(62,246백만원)
	1) 토지매입비		0			비고
	2) 설계비		3,485
	3) 감리비		3,009
	4) 공사비		53,975
	5) 기타부대비		1,777

향후 계획 및 일정	구 분	연월	결과	관련기관	비고
	설계	2026. 2.		자체
	착공	2026. 2.		자체
	준공	2028. 12.		자체